투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경 시행[교통안전시설(노면표시) 유지보수공사]

1. 도로보수과 - 2640(2021.6.8.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인『2021년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명: 2021년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간: 2021.03.23.~2021.12.31.

다. 공사규모: 차선도색 204,480m, 차선제거 12,000m

라. 도 급 자: ***********

마. 변경사유: 도로교통 소통개선 및 교통사고 잦은 곳 개선 사업 추가 및 시공물량 변경

바. 변경내역

○ 도급비 변경

구 분		금 액(원)			비고
		당 초	변 경	증·감
도급비	공급가액	***********	***********	************
	부 가 세	**********	**********	***********
	합 계	***********	***********	************

○ 공사기간: 변경사항 없음

사. 예산과목

- 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 노후포장도로정비공사, 시설비및시설부대비, 시설비**************

- 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 도로교통 소통개선, 시설비및부대비, 시설비*************

- 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 교통사고잦은곳 개선, 시설비및부대비, 시설비*************

붙임  1. 설계변경 검토보고 1부.

2. 설계변경 내역서(제1차) 제출 1부

3. 합의각서 1부.  끝.

							도로보수과장
주무관							이종호			도로보수과장					06/08 한정환
협조자
시행			도로보수과-2648									(						)		접수											(						)
우	07520					서울특별시 강서구 양천로 237 강서도로사업소 도로보수과															/
전화		02-2657-7952						/전송			02-2657-7960					/	leejhkim@seoul.go.kr												/	부분공개(7)