(발주처 작성서식)

실정보고 검토서

공 사 명

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

공사개요

· 위    치 : 서울특별시 성동구 용답동 243-3

· 규    모 : 총인 41.2만㎥/일

· 공사기간 : '17.9.13.~'21.6.30.

· 도 급 비 : 17,411백만원(조경 407백만원)

· 시공사 : 엘림종합건설(주)외 2개사

[조경 ㈜성도건설]

· 감리단 : ㈜천일 외 3개사

· 설계사 : ㈜도화엔지니어링

실정보고 건명

토목공사구간 추가 잔디식재 실정보고서 검토

실정보고 사유

토목공사구간 중 배수로 및 경계석 설치 후 토사노출구간에 대한 피복처리 및 건물 진입로 확보 필요

건설사업관리단

검토의견

토사노출구간에 대해 토사유출방지 및 미관을 고려한 잔디식재와 이용자의 건물

진출입을 위해 판석포장을 하는 것으로 반영함이 적정함

공기에 미치는 영향

없음

변경(안)

< 주요 수량 증감>

공 종		단위	수량			비 고
			당 초	변 경	증 ․ 감
****	******	*	*	***	***
	*******	*	*	*	*

< 공사비 증감>

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
*****	*	*********	*********
*******	*	*********	*********
*****	*	**********	**********

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 ( ○ )

당초 사업비 범위내 시행가능 (    )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

없음

발주처

검토의견

건설사업관리기술자의 검토의견이 적정하다고 판단되며, 실정보고 사항을 승인처리 후 추후 설계변경시 반영하고자 함.

비 고

결재

주무관

김희숙

공원시설과장

이병호

방재시설부장

06/08

박홍봉

협조