실정보고 검토서

공사명

동부간선도로 확장공사(1공구)

공사개요

· 위 치 : 월계1교~녹천교

· 규 모 : 도로 확장 4→6차로, L=1.4km

· 공사기간 : ‘07.10.~‘21.06.

· 도 급 비 : 358억원

· 시공사 : ㈜풍산건설 외1

· 감리단 : ㈜도화엔지니어링

· 설계사 : ㈜천일

실정보고 건명

중랑천변 장애인 화장실 복구 실정보고

실정보고

사유

중랑천 파크골프장 조성 공사 중단 요청(장애인복지과-12632호)

· 장애인 편의시설(화장실, 경사로 등) 부재로 민원이 지속적으로

발생하고 있으므로 공사 중단 요청

장애인 편의시설 설치 관련 의견 제출(장애인복지과-13951호)

· 중랑천 유지관리 도로 주변 별도 화장실 설치 요청

설치 규모

· 남(소변 1, 대변1), 여(대변1)

※ 홍수위 위에 설치되며, 강우(홍수) 시 이동 조치 가능

건설사업관리단

검토의견

- 초안산지하차도 시공 중 철거된 장애인 화장실을 관리기관과

협의된 바와 같이 시공하는 것이 타당함.

공기에 미치는 영향

0 개월

변경(안)

구분	당초	변경	비고
화 장 실		남(소변1, 대변1), 여(대변1)	-
난 간		70m	-
상·하수도		1식	-
금액	-	99,000,000원	증)99,000,000원

예산조치 계획

당초 사업비 범위 내 시행 가능

발주처

검토의견

건설사업관리단의 검토의견이 타당하여 승인 조치하고 추후 설계변경에 반영하고자 함.

결재

담당

권해엽

과장

장종환

부장

06/08

代진재섭