문서번호	기전과-5911
결재일자	2021. 6. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이지영		06/09 배수웅
협조

『2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

실정보고 검토 보고(2차 작업지시)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 6. 9.(수)

동부도로사업소

(기전과)

『2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

실정보고 검토 보고(2차 작업지시)

2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)와 관련

감리업체로부터 제출된 실정보고에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		관련근거

□ 제2차 작업지시[2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)]   ○ 기전과-4627호(2020.05.06.)

□ 제2차 작업지시(추가)[2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)]   ○ 기전과-5215호(2020.05.24.)

□ 작업지시 2차(추가1)[2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)]   ○ 기전과-5615호(2020.06.01.)

□ 2021년 동부1구역 교통신호 유지보수공사(연간단가) 1차작업지시 실정보고서류 제출   ○ ㈜협우지여엔지니어링 서교감 제21-33호(2020.05.14.)

2		사업개요

□ 사 업 명 : 2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)

□ 사업기간 : 2021. 3. 29. ~ 12. 31.

□ 계 약 자 : ㈜보원전기 대표 정혜원

□ 계약금액 : 금454,677,300원(금사억오천사백육십칠만칠천삼백원정)

3		제2차 작업지시 내용

□ 작업내용 : 교통신호제어기 및 신호지주 신설 등

□ 작업장소 : 은마아파트입구 외 41개소

□ 작업기간 : 2021. 5. 6.(목) ~ 2021. 6. 30.(수)

□ 작업지시 금액 : 금211,266,000(금이억일천일백이십육만육천원정)

4		실정보고 내용

□ 주요 검토내용

교차로명	현황 및 문제점	감리 의견	검토 결과	비고
세곡LH1단지	① 제어기 부분품(관급) LSU 제어기 현시에 맞게 조정 필요	① 제어기 현시에 맞게 조정(5→0)5개 감	적 정
우리은행역삼	① 기존 관로 사용 불가로 인한 신호케이블 가공 설치 요망(P3~P1) ② 기존 관로 사용 가능(P1~H1)	① 기존 관로을 사용하려고 하였으나 기존 관로 사용 불가로 인한 신호케이블 가공 설치 물량 변경(P3~P1) ② 기존 관로 사용 보도굴착 물량 삭제(P1~H1)	적 정
아크로힐스논현아파트	① 강남경찰서에서 야간작업시 민원발생으로 야간 작업 불가	① 야간작업시 소음으로 인한 민원발생 방지하기 위해 야간작업에서 주간작업 변경	적 정
논현지구대	① 제어기 부분품(관급) LSU 제어기 현시에 맞게 조정 필요	① 제어기 현시에 맞게 조정(2→0)2개 감	적 정
영동고	① 제어기 부분품(관급) LSU 제어기 현시에 맞게 조정 필요	① 제어기 현시에 맞게 조정(6→3)3개 감	적 정
탄천하수 처리장	① 제어기 부분품(관급) LSU 제어기 현시에 맞게 조정 필요	① 제어기 현시에 맞게 조정(2→0)2개 감	적 정

□ 주요 변경내용

교차로명	품 명	규 격	구분	단위	수량			비 고
					당초	변경	증/감
세곡LH1단지	제어기 부분품(관급)	L.S.U 기존 제어기에 추가	신설	본	5	0	-5	감 226,409
	교통안전표지	각종(원형,삼각,사각)	이설	EA	2	1	-1
	교통안전표지	각종(원형,삼각,사각)	철거	EA	0	1	1
우리은행역삼	신호케이블	가공2선 F-CVV,1.5SQ/5C	신설	M	0	24	24	감 913,926
	신호케이블	지중1선(2.5SQ/1.5SQ 공통)	재설치	M	29	0	-29
	신호케이블	지중2선(2.5SQ/1.5SQ 공통)	재설치	M	7	0	-7
	신호케이블	지중1선(2.5SQ/1.5SQ 공통)	철거	M	34	0	-34
	신호케이블	가공1선(2.5SQ/1.5SQ 공통)	철거	M	45	30	-15
	신호케이블	가공2선(2.5SQ/1.5SQ 공통)	철거	M	0	24	24
	신호케이블	가공24(2.5SQ/1.5SQ 공통)	철거	M	0	11	11
	전선관 배관	PE Ø54㎜ 1열	신설	M	2	0	-2
	전선관 배관	PE Ø100㎜ 1열	신설	M	9	0	-9
	소형고압블럭 굴착배관	기계 80%+ 인력 20%,1-2열배관	신설	M	11	2	-9
	경고테이프 설치	B=300㎜×1M	신설	M	11	2	-9
	교통안전표지	각종(원형,삼각,사각)	이설	EA	1	0	-1
	교통안전표지	각종(원형,삼각,사각)	철거	EA	0	1	1
	가로등주	8M - 9M	철거	본	1	0	-1
	가로등암(1등용)	200W - 300W(등기구, 안정기 포함)	이설	본	1	0	-1
	가로등주 기초제거	가로등주 10m이하	철거	EA	1	0	-1
	가로등 전원케이블	지중4선 F-CV,10SQ/1C	재설치	M	5	0	-5
	가로등 접지케이블	지중1선 F-GV 10SQ	재설치	M	5	0	-5
	가로등 표찰		이설	EA	1	0	-1
	가로등암 Pipe	Ø139.8×3.6t×1~3m	신설	본	1	0	-1
아크로힐스논현아파트	지주기초 및 앙카(기성품 사용)	Ø125㎜(보행지주)	신설	조	0	1	1	감 3,651,945
	지주기초 및 앙카	Ø125㎜(보행지주)	신설	조	2	1	-1
	전선관 배관	PE Ø100㎜ 1열	신설	M	0	3	3
	전선관 배관(야간)	PE Ø100㎜ 1열	신설	M	3	0	-3
	후강전선관 배관	Ø104㎜×3.6m×2열	신설	M	0	40	40
	후강전선관 배관(야간)	Ø104㎜×3.6m×2열	신설	M	40	0	-40
	아스팔트 횡단굴착	기계 80%+ 인력 20% ,2열배관	신설	M	0	34	34
	아스팔트 횡단굴착(야간)	기계 80%+ 인력 20% ,2열배관	신설	M	34	0	-34
	소형고압블럭 굴착배관	기계 80%+ 인력 20% ,2열배관	신설	M	0	15	15
	소형고압블럭 굴착배관(야간)	기계 80%+ 인력 20% ,2열배관	신설	M	15	0	-15
논현지구대	제어기 부분품(관급)	L.S.U 기존 제어기에 추가	신설	EA	2	0	-2	감 80,176
영동고	제어기 부분품(관급)	L.S.U 기존 제어기에 추가	신설	EA	6	3	-3	감 120,264
탄천하수처리장	제어기 부분품(관급)	L.S.U 기존 제어기에 추가	신설	EA	2	0	-2	감 80,176
※ 타 세부사항은 실정보고 내역서 참조

5		보고자 의견

□ 감리업체로부터 접수된 실정보고에 대하여 검토한 결과 감리의견이 적정한 것으로 판단되어 실정보고를 승인하고 추후 설계변경을 시행하고자 함.

붙 임 : 실정보고서 제출 공문 1부.  끝.