“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경(2차-최종) 계약의뢰(2020년 서초구 관내 상수도시설물설치공사 및 보수공사)

우리 사업소에서 시행중인 “′20년 서초구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사(장기계속단가계약)"에 대하여 신규 공종 및 계약물량 증 ․ 감 사항이 발생함에 따라 아래와 같이 설계변경(2차-최종)하고 계약의뢰코자 합니다.

가. 공 사 명: ′20년 서초구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사(장기계속단가계약)

나. 도 급 자: 대자기업(주)  대표 조석규

다. 계약기간: ′20. 7. 06. ~ ′21. 6. 30.(총부기기한)

라. 설계변경 금액: 787,116,000(감1,009,780)

구 분	당초 금액(원)	변경 금액(원)	비 고(원)
총부기금액	788,125,780	787,116,000	감1,009,780
1차 부기금액	394,062,890	588,181,000
2차 부기금액	394,062,890	198,935,000	감1,009,780

마. 차수별 부기금액 변경

바. 설계변경 사유: 신규공종 및 공종별 계약물량 증,감 발생

- 계약물량 증가 : 콘크리트포장절단 외 74개 공종

- 계약물량 감소 : 인력터파기 외 382개 공종

- 신 규 공 종 : 벽체계량기설치공(15mm)외 30개 공종

사. 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비(노후밸브정비)

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비(배수지등시설물)

자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비, 유량계설치

소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축, 소방용수시설등의 설치 및                 관리, 일반회계, 소방용수시설설치․보수, 시설비

따로붙임:  1. 설계변경 심의 결과 및 의견서 각 1부.

2. 설계변경 사유서(내역서) 각 1부.

3. 검증확인서 및 변경합의서 각 1부.  끝.

	시설관리과장
시설안전팀장	김재영		시설관리과장	06/08 代김진성
협조자
시행	시설관리과-9415	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동) 강남수도사업소 시설관리과(4층)	/
전화	02-3146-4891	/전송	02-3146-4939	/	sdc5000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)