문서번호	계획설계과-5188
결재일자	2021. 6. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	계획설계과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
여성우	송헌영	신용철		06/10 구아미
협 조
	배수과장		김근용
	주무관		이재학
	주무관		정호정

상수도관망 모니터링 시스템 구축을 위한

상수도관 내부상태 조사방법 변경계획

2021.  6.

상수도사업본부

(급수부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

상수도관망 모니터링 시스템 구축을 위한

상수도관 내부상태 조사방법 변경계획

1단계 용역(’20년 상수도관 내부상태 조사)상 장애요인을 보완하고 2단계 용역을 원활하게 추진하기 위한 조사방법 변경계획을 보고 드림

Ⅰ		추진 배경

□ 관련 근거

○『상수도관망 모니터링 시스템 구축 기본계획(배수과-2607, ’20.3.10.)』

- ***************************************************

⇒ ***********************************************************

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 추진 경과

○ ’20. 7. 3.  : 1단계(’20년) 용역 착수

- 대 상 : 30년이상 경과된 D400mm이상 송‧배수관 451km

○ ’21. 3.19. : 2단계(’21년) 용역 계약

- 대 상 : 20~30년미만 경과된 D400mm이상 송‧배수관 392km

○ ’21. 4.28. : 1단계 용역 변경계획 수립

- 내시경 가능한 공기밸브 부족, 내시경만으로 관 상태평가 곤란 ⇒ 정산 준공

- 비굴착 갱생관로에 대하여 CCTV 내부 상태 조사 시행 필요성 제기

Ⅱ		현황 및 문제점

□ 2단계 용역 현황

○ 기    간 : ’21. 3월 ~ ’22. 3월 (용역비 : 1,370백만원)

○ 대    상 : 20~30년 미만 경과 D400mm이상 송배수관 392km

○ 조사방법 : 1단계 용역과 동일한 ‘공기밸브를 활용한 내시경 조사’

- 내시경 조사 392개소 (1개소/km), 시편채취 및 물성시험 30개소

○ 추진현황 : 용역 착수 계획 수립 중 (공정 회의 4회)

□ 1단계 용역 추진 결과 (’21. 4.28. 본부장 방침)

○ 내시경 조사가 가능한 공기밸브 부족 ⇒ 정산 준공

- 전체 공기밸브 중 내시경 조사 가능 비율이 7%(43/610개소)에 불과

※ 사유 : 내시경 투입에 필요한 공기밸브 형식 부적정 등

****************************************************************************************************************************

○ 내시경 조사로 획득한 영상만으로는 관 상태평가 어려움

- 관바닥 일부분의 영상만 획득 → 입체적인 관 내부 상태평가 곤란

********

○ 비굴착 갱생관로에 대하여 CCTV 등 내부 상태 조사 용역 추진

- 대상관로 : D400 ~ D1650mm, 124개소 131km

Ⅲ		2단계 용역 관 내부 상태 조사 방법 변경 계획

□ ************

○ ***********************************************

- ******************************************

※ **************************************************************************

○ **************************************

□ **********

○ *****************************************************

- *******************************

- ********************

- ************************************

※ 내시경 및 CCTV 조사 비교

구 분	내시경	CCTV
장‧단점	▸부단수 조사 가능 (미세 토립자 확인 가능) ▸흐름방향에 따라 조사지점 주변만 촬영 ▸기포, 유속으로 인한 흔들림 등 상황에 따라 영상 품질 편차발생	▸단수 후 조사 가능 (관벽 상태 확인 가능) ▸지점별 전‧후 200m 이동 촬영 가능 ▸카메라 방향전환, 줌인‧줌아웃 등 제어로 관 내부 전체의 상세한 영상 획득 가능
장 비 예 시
개 요 도

Ⅳ		협조 사항 및 향후 계획

□ 협조 사항

○ 배수과, 수도사업소

- 비굴착 갱생관로 CCTV 조사를 위한 단수 및 수계전환 및 작업구(밸브실) 확보

- 내시경 조사가 가능한 공기밸브 용역사 현장 조사 협조

- 관 내부 상태 조사(CCTV‧내시경‧시편채취 및 물성조사) 필요시 요청

□ 향후 계획

○ ’21. 6월 중 : 용역 추진 변경 계획 통보	【본부 → 용역사】

○ ’21. 6월 말 : 내시경 및 CCTV 대상지 현장 조사

○ ’21. 7월 ~ : 내시경 및 CCTV 조사 추진. 끝.