문서번호	설비부-8005
결재일자	2021. 6. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	녹색성장과장	설비부장
김수진	오삼록	06/10 김호성

『동부간선도로 확장(2공구) 전기공사』

교통신호기 실시설계용역 추진계획

2021. 6.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로 확장(2공구) 전기공사』

교통신호기 실시설계용역 추진계획

『동부간선도로 확장(2공구) 전기공사』와 관련, 서울지방경찰청 최종 교통처리계획 규제 심의사항을 반영하기 위한 교통신호기 실시설계용역 추진계획을 보고 드림

1		공사개요

❍ 사 업 명 : 동부간선도로 확장(2공구) 전기공사

❍ 위    치 : 동부간선도로 녹천교 ~ 상계주공아파트 11단지

❍ 규    모 : 도로확장(L=3.2㎞, 4차로→6차로)
- 도봉지하차도 건설(L=2,999m, 편도 3차로)

- 마들로 철거 후 복구(L=2,590m, 왕복 4차로→6차로)

❍ 공사기간 : 2008. 12. 30. ~ 2021. 10. 31.

❍ 감 리 단 : ㈜이산

❍ 시 공 사 : ㈜태경이엘피

❍ 공 정 률 : 90%

- 토 목 : 주공18단지 앞 배수시설 설치 중

- 전 기 : 가로등 기초 매입 공사 중

2		추진경과

❍ `07.08. : 기본 및 실시설계 완료

❍ `08.12. : 공사착공

❍ `11.09. : 동부간선도로 변경설계 완료(1차)

- 도봉지하차도 연장(1,120⇒1,900m), 방재등급(3등급⇒2등급) 상향

❍ `16.12. : 동부간선도로 변경설계 완료(2차)

- 도봉지하차도 연장(1,900⇒2,990m), 방재등급(2등급⇒1등급) 상향

❍ `20.12. : 도봉지하차도 공사 완료 및 개통

3		설계용역 추진개요

추진근거

❍ 교통안전시설물 개선 설치 통보(교통관리과-11820호, `21.6.3.)

- 동부간선도로 지하화 완료 후 차량통행 동선 변화에 따른 교통안전시설물 개선

❍ 교통신호기공사 업무처리 가이드라인(교통운영과, `14.3.)

❍ 전력기술관리법 제11조(전력시설물의 설계도서 작성 등)

추진 필요성

❍ 2011년 도봉지하차도 연장 변경(1,120⇒1,900m)되어, 지상 도로인 마들로의 교통신호기 설비가 과업에 반영되었고,(교통처리계획 미반영된 상태로 설계 납품됨)

❍ 2021년 6월 서울지방경찰청에서 최종 교통처리계획 규제 심의 완료 후 교통안전시설물 개선 설치 통보되어, 마들로 차로재구획, 횡단보도 위치 변경 등에 따른 교통신호기 설계변경 사항이 발생하였음.

❍「교통신호기공사 업무처리 가이드라인」에 따라 전력시설물의 설계업을 등록하고, 교통전문분야 엔지니어링(교통기술사 보유) 신고한 업체에서 설계 추진이 필요함.

수행절차

교통안전시설 심의 (경찰청)		심의사항 검토 후 설계지시(설비부)		현장조사, 실시설계 (설계업체)
실시설계서 납품 (설계업체)		원인자공사 접수 (설비부)		설계적정성 검토 후 시행승인(도로사업소)
공사시행 (감리)		교통안전시설물관리 시스템 (T-GIS) 입력		원인자공사 준공 (도로사업소)

4		설계용역 추진계획

❍ 용 역 명 : 동부간선도로(2공구) 교통신호기 실시설계용역

❍ 용역대상 : 마들로 6개 교차로

❍ 용역내용 : 교통신호기 교체·신설·이설 등 관련 실시설계

❍ 소요예산 : *******

※「전력 시설물공사 설계 및 설계 감리 요율(산자부 고시 제2005-7호)」 적용, 산정한 설계비와 견적가(3개 업체)를 비교하여 최소액 제시업체 선정

❍ 계약방법 : ************************

- ****************************************************

❍ 용역자격(아래 자격을 모두 갖춘 자)

- 전력기술관리법 제14조 규정에 의거 전력시설물의 설계업(전문2종 이상)을 등록한 자

- 엔지니어링산업진흥법 제21조에 의거 엔지니어링사업자(건설부문 교통분야)로 신고하고 교통기술사를 보유한 업체

- 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

5		조치계획

❍ 6월 20일 토목 도로포장공사 이전 교통신호기 매입 배관 설치하여야 할 상황이므로, 전기공사 원가계산서에 용역대가 반영 조치하여 설계를 신속히 추진하고, 공정 관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 1. 서울지방경찰청 공문 및 교통처리계획도 1부.

2. 교통신호기 설비 변경 비교표 1부.

3. 설계용역비 산출내역서 및 산출기초조사서 1부.

4. 과업내용서 1부.  끝.