문서번호	설비부-8108
결재일자	2021. 6. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박근형		오삼록	06/11 김호성
협조

『시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사』

설계변경(1차) 검토 보고

2021. 6.

도시기반시설본부

(설비부)

『시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사』

설계변경(1차) 검토 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사』관련 건설사업관리기술단으로부터 제출된 설계변경 사항에 대하여 검토 보고 드림

Ⅰ		사업개요

○ ****************************

○ ***********************************

○ ******************************************

○ **********************************************************

○ *******************************************

○ *************************

○ ***********************************

Ⅱ		관련근거

○ 전기공사 1차 설계변경 승인요청 [시립CM제2021-180호 ('21.06.11.)]

Ⅲ		검토내용

○ 계약현황

계약번호 (납품요구번호)	계약자	계약건명	차수	계약기간	계약금액(원)
**************	*************	****	**	***********************	*************
			**	***********************	**********

○ 변경사유 : 공정현황을 고려하여 시공 가능 여부에 따라 1차분과 총차분 물량을 조정하여 내역 변경하기 위함

○ 변경내용

- 1차공사 준공기한 내에 시공가능 부분은 1차 내역분에 반영하고, 시공불가 부분을 장래 시공분으로 조정

○ 변경금액

구분	당초	변경	증감	비고
**	**************	**************	*	**** ******
**	***********	***********	*

○ 계약기간 : 변경없음

○ 건설사업관리인 검토의견

- 공정현황을 고려하여 시공가능 여부에 따라 1차분과 총차 내역물량을 조정하여 전체 공사비 증감없이 내역만 조정하는 것이 타당하다고 판단됨.

Ⅳ		보고자의견

○ 건설사업관리기술인의 설계변경 검토의견이 적정하다고 판단되어 전기공사 건에 대하여 계약부서(총무부)에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임  건설사업관리단 공문 1부.  끝.