문서번호	시설관리과-14232
결재일자	2021. 6. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
★기전팀장		시설관리과장		동부수도사업소장
백민		송병욱		06/11 이재호
협 조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

2022년도 기전설비 개량사업 예산편성 계획

2021. 6.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년도 기전설비 개량사업 예산편성 계획

우리사업소 기전설비중 내용연수 경과로 성능이 저하된  노후 설비에 대하여 2022년도 기전설비 개량사업 예산편성 계획을 보고 드림.

□ 관련근거

○ 수도법 제2조(책무) 제4항(계획적인 정비 및 안전한 수돗물 공급)

□ 기전설비 현황 : 191개소

(단위 : 개소)

제어 센터	배수지	아리수올림터		증압장	유량계(66개소)			전식 설비	CCTV
		유인	무인	무인	구역	중블록	증압장·배수지
1	8	1	3	12	19	24	23	65	36

□ 사업대상 및 소요예산 : 1,666백만원

① 아차산(배)아리수올림터 모터펌프 개량	:    264백만원

② 청량리증압장 모터펌프 개량	:    123백만원

③ 대현산(배)아리수올림터 수배전반 개량	:    638백만원

④ 대현산(배)아리수올림터 원격제어반 개량	:    344백만원

⑤ 아차산소배수지 밸브 전동구동장치 지상화	:     11백만원

⑥ 노후 유량계 및 전송반 교체	:     99백만원

《아차산 모터펌프》	《청량리 모터펌프》	《대현산배수지 수배전반》

□ 2020년도 기전설비 개량사업(기계장치비) 예산요구 내역

연번	사 업 명	사 업 개 요	예산액 (백만원)	사 업 필요성	비고
	계		1,666
1	아차산(배)아리수올림터 모터펌프 개량	- 펌프개량 : 56kW×2대 - 밸브 및 부대배관 교체	264	노후 및 내용연수 경과	2007년식 (11년)
2	청량리 증압장 모터펌프 개량	- 펌프개량 : 15kW×2대 - 밸브 및 부대배관 교체	312	노후 및 내용연수 경과	2009년식 (11년)
3	대현산(배)아리수올림터 수배전반 개량	- 대현산 배(분)전반 : 5면 - 전동기 제어반 : 7면 - 기타 부대 전기공사 : 1식	636	노후 및 내용연수 경과	2011년식 (10년)
4	대현산(배)아리수올림터 원격제어반 개량	통합원격감시제어반 : 2면 기타 부대 전기공사 : 1식	344	노후 및 내용연수 경과	2012년식 (10년)
5	아차산소배수지 밸브 전동구동장치 지상화	- 구동장치 지상 인상 : 2대 기타 부대 전기공사 : 1식	11	지하시설 내 습기로 인한 오작동 유발	-
6	노후 유량계 및 전송반 교체	- 유량계 교체 : 4대 전송반 교체 : 5대	99	노후 및 내용연수 경과	2011년식 (11년)

□ 예산편성 추진일정

○ 2021. 06월	: 사업부서 2022년 예산요구서 제출

○ 2021. 07월	: 상수도본부 예산(안) 최종 조정회의

○ 2021. 18월	: 본청 예산담당관 예산안 조정회의

○ 2021. 11~12월	: 2022년 예산(안) 시의회 심의

□ 행정사항

○ 2022년도 아리수올림터·배수지 노후 기전시설 개량사업(시설비) 및

유량계 신설·교체사업(기계장치, 시설비)에 반영하여 예산편성 추진

붙임 : 2022년도 예산 사업설명서(산출내역 포함) 각 1부. 끝.