문서번호	도시철도건축부-4374
결재일자	2021. 6. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	건축계획과장	도시철도건축부장	도시철도국장		도시기반시설본부장
박창형	이병희	임우진	한유석		06/14 김진팔
협 조
	도시철도계획부장			정대현

「위례선(트램) 도시철도 건설사업」

정거장 캐노피 디자인 아이디어 공모 계획(안)

2021. 6.

도시철도건축부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

위례선(트램) 정거장 캐노피 디자인 아이디어 공모 계획

위례선 트램 정거장의 캐노피 디자인 아이디어 공모를 통해 다양하고 창의적인 디자인을 발굴·적용하여 고품격 시민편의공간을 계획하고자 함

1		사업개요

□ 건축개요

○ 규    모 : 정거장 12개소(환승 4개소), 차량기지 1개소

○ 사업기간 : `21 ∼ `25  / 공 사 비 : 198억(전체 1,966억원)

□ 추진현황

○ ’20.10. : 기본계획 승인(대도시광역교통위원회)

○ ’20.11.∼ ‘21.04 : 건설기술심의(입찰방법, 입찰안내서 등)

○ ’21. 5. 13.: 공사입찰공고

2		추진계획

□ 공모개요

○ 공 모 명 : 위례선(트램) 정거장 캐노피 디자인 아이디어 공모

○ 공모기간 : `21.7. 8.∼ 9. 17.

○ 응모자격 : 위례선 정거장 디자인에 관심 있는 일반인 누구나

○ 선정상금 : 총 6작품, 총 시상금 3천2백만원

구 분	대 상	최우수상	우수상	계
당선작	1개	2개	3개	6개
시상금	1,000만원	800만원	200만원	3,200만원

- 당선작 디자인 사용권 지급 금액은 시상금으로 갈음

- 선정된 디자인 외 우수 디자인은 도시철도 정거장 디자인 향상 자료로 활용

□ 위례선 추진 일정

위례선 입찰공고		현장설명회 · 공모계획 공지 · 디자인 특화 · 정거장 디자인 감안 공사비 배분		입찰자 기본설계(안) 작성		적격자 선정		실시설계
‘21. 5. 13.		‘21. 6. 14.		‘21년 6 ~ 11월		‘21년 12월		‘21년 12월~
				정거장 캐노피 디자인 공모 (‘21년 7 ~ 9월)

□ 공모 일정

구 분	일 정	비고
공모시행 공고	2021. 7. 8. (목)
참가 등록	2021. 7. 8. (목) ∼ 7. 30.(금)
질의 접수	2021. 7. 19. (월) ∼ 7. 23.(금)
질의 답변	2021. 7. 29. (목)
제안서 제출 (온라인 제출)	2021. 9. 6. (월) ∼ 9. 9.(목)
심 사	2021. 9. 14. (화)
심사결과 발표	2021. 9. 17. (금)

3		소요예산

□ 총 소요예산 : 3천4백만원

구분	소요예산	상세내역	비고
시 상 금	32,000,000	대상, 최우수상, 우수상 시상금
심의수당	1,500,000	150,000 × 5명 × 2회
운 영 비	500,000	사무용품, 다과 등
합 계	34,000,000

○ 예산과목 : 광역철도 건설사업, 위례선 도시철도 건설, 시설부대비

4		행정사항

○ 현장설명회(6월14일 예정)시 공모계획을 공지하고 실시계획에 반영 안내

- 공모 선정 디자인과 실시설계적격자의 디자인을 도시철도 디자인 위원회에 상정하여 적용할 디자인을 결정하고 실시설계에 반영

- 위원회 심의결과 보완 및 향상된 디자인 변경에 대응할 수 있도록 공사비 편성

○ 서울시 설계공모 통합 홈페이지 (http://project.seoul.go.kr)에 등록

붙임 : 공고문(안) 1부.  끝