문서번호	설비부-8180
결재일자	2021. 6. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
마권택		代박희준	06/14 김호성
협조
	주무관		박희준

「서울의료원 권역응급의료센터 증축 공사」

설비분야 예비준공검사 시행계획

2021. 6.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「서울의료원 권역응급의료센터 증축 공사」

설비분야 예비준공검사 시행계획

「서울의료원 권역응급의료센터 증축 공사」설비분야(기계/소방, 전기, 통신)

예비준공검사 시행계획을 보고드림

1		공사개요

○ 공 사 명 : 서울의료원 권역응급의료센터 증축 공사(기계/소방,전기,통신)

○ 위    치 : 중랑구 신내로 156(신내동 316)

○ 규    모 : 지상5층, 연면적 4,950㎡, 증축, 의료시설(종합병원)

○ 기    간 : `19.03.22.~`21.07.30.

○ 감 리 사 : ㈜종합건축사사무소 동일건축 외 1개사

○ 계약현황

구 분	기계/소방	전기	통신
업 체 명	***********	***	*****
계약금액	*************	*************	***********
계약기간	********************	********************	********************

2		관련근거

○ 건설사업관리단 예비준공검사 시행계획 보고〔동일감리 제21-177호(2021.06.10.)〕

○ 예비준공검사 시행방법 개선〔기술심사담당관-10127호(2018.06.29.〕

○ 건설공사 사업관리방식 업무수행지침〔국토교통부고시 제2020-306호〕

3		예비준공검사 계획

□ 사업 진행현황

공 종	건축	기계/소방	전기	통신	전체	비고
공정률(%)	92.52	89.30	90.11	78.71	87.33

□ 예비준공검사 일정

○ 일    시 : 2021.06.15.(화) 14:00

○ 장    소 : 서울의료원 권역응급의료센터 증축 공사 현장사무실

□ 예비준공검사 참여자

○ 검 사 자

기 관	참 여 자
도시기반시설본부	설비부 소속 직원 2명

○ 입 회 자

기 관	참 여 자
도시기반시설본부	분야별 공사관리관
서울의료원	서울의료원 시설관리팀 담당자
건설사업관리단	책임건설사업관리기술자 및 분야별 건설사업관리기술자
시 공 사	분야별 현장대리인

□ 주요 검사내용

○ 공사 중 미비한 사항의 사전 보완

○ 공사 품질확보 및 하자 발생 방지를 위한 사전점검

○ 시설물 인수·인계 관련 사전 보완사항 점검

○ 기타 예비준공검사 시행 목적에 부합한 사전점검 및 확인 등

□ 점검결과 조치계획

○ 예비준공검사 결과 지적사항은 건설사업관리기술자에게 보완 지시

○ 지적사항 보완 후 책임건설사업관리기술자 확인하여 준공검사원 제출

4		향후계획

○ 2021. 07. : 공사 준공

○ 2021. 08. : 시설물 인수·인계

붙임  건설사업관리단 예비준공검사 시행계획 보고 1부