투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(전기 분야 건설사업관리기술자 배치기간 변경 요청)

1. 업무지시현장 : 신상도 지하차도 확장공사 극동엔지니어링 주식회사

2. 작 성 일 자 : 2021-06-14 10:06:07

3. 지 시 내 용

가. 설비부-3109(2021.6.11.)호와 관련입니다.

나. 설비부로부터 「신상도 지하차도 확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」의 전기 분야 건설사업관리기술자의 배치기간을 아래와 같이 변경하여 달라는 요청이 있어 알려드리오니, 설계변경 시 반영하여 주시기 바랍니다.

□ 변경내용

구 분	배치기간			비고
	당 초	변 경	증 · 감
전기 분야 건설사업관리기술자(1인)	4개월	5개월	증) 1개월

붙임  1. 관련공문 1부.

2. 검토보고서 1부.  끝.

주무관							이시연			방재시설과장					김태중					방재시설부장					06/14 박홍봉
협조자				주무관						김상용
시행			방재시설부-7710									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층															/
전화		02-3708-8764						/전송			02-3708-8756					/	siyeon0907@seoul.go.kr												/	부분공개(5)