문서번호	급수운영과-9869
결재일자	2021. 6. 15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
김희철	양재덕	06/15 代임인택
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

「잠실동 외 11개동 상수도공사」 현장실정보고

2021. 6.

급수운영과

「잠실동 외 11개동 상수도공사」

현장실정보고

「잠실동 외 11개동 상수도공사」와 관련하여 집하장 및 사토장 신고서가 제출되어 이에 대한 검토 및 조치계획을 보고합니다.

Ⅰ		현 황

상수도공사 현황

○ 공 사 명: 잠실동 외 11개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요: D=15〜300㎜, L=987m

○ 공사기간: 2020. 6. 17.~2021. 6. 30.

○ 계약금액: 641,372,490원

○ 도 급 자: 유에이환경테크(주) 대표 장일웅

※ 실정보고(집하장 및 사토장 신고서 제출)-급수운영과-9782(2021.6.14.)

Ⅱ		보 고 내 용

사토장 변경

○ 당초 경기도 광주시 퇴촌면 도수리 산39-8(재해지 산지복구현장)으로 사토를 처리하였으나, 2021년 3월부터 사토장으로 이용 불가하기에 경기도 양평군 양평읍 오빈리 45-13으로 변경하고 운반거리 변경에 따른 운반비를 변경코자 함

(운반거리 31km → 38km)

Ⅲ		조치계획

상기와 같이 사항을 설계변경에 반영하고 사토장을 변경하여 처리토록 계약업체에 통보코자 합니다.

붙임  공사 실정보고 1부(별첨).   끝.