문서번호	토목부-11289
결재일자	2021. 6. 14.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

		시 민
주무관	토목설계과장	토목부장
김종혁	김동현	06/14 김용제

준공기한 연기 검토 보고

- 동부간선도로(창동~상계구간) 지하차도 건설공사 지하안전영향평가용역 -

2021. 6.

도시기반시설본부

토목부

- 동부간선도로(창동~상계구간) 지하차도 건설공사 지하안전영향평가용역 -

준공기한 연기 검토 보고

『동부간선도로(창동~상계구간) 지하차도 건설공사 지하안전영향평가용역』추진중 협의기관인 서울지방국토관리청의 보완 의견에 따른 준공기한 연기 검토 보고임

※ 테스콤 TESJ 제21-22호(2021. 6. 9.), 준공기한 연기 요청

□ 용역 개요

❍ 용 역 명 : 동부간선도로(창동~상계구간) 지하차도 건설공사 지하안전영향평가용역

❍ 규    모 : 폭원 3차로(12.5m), 유출연결로 6.5m, 지하차도 건설 1.70㎞ (지하차도 구간 1,356m), BOX 925m, U-type 431m

❍ 용역기간 : *********************

❍ 용 역 비 : ************

❍ 용 역 자 : ㈜테스콤엔지니어링

□ 용역 추진 개요

❍ ’20.11.17. : 소규모 지하안전영향평가 계약 및 착수

❍ ’21.03.15. : 지하안전영향평가 협의 요청 (토목부→서울지방국토관리청)

❍ ’21.04.27. : 지하안전영향평가서 보완요청 (서울지방국토관리청→토목부)

□ 준공기한 연장

❍ 준공기한 연기 : ***

- 용역기간 : *************************************************

❍ 귀책소재 : 서울특별시

❍ 지체상금 : 미부과

❍ 연기사유 : 지하안전영향평가 협의기관인 ‘서울지방국토관리청’의 보완 요청에 따른 보완서 작성 후 자문위원 사전 검토 등 협의 기간 소요

□ 조치의견 : 준공기한을 ’21.9.30.까지 연기하여 용역을 관리하고자 함

붙임 : 준공기한 연기 요청서 1부.(합의각서, 예정공정표 포함) 끝.