	서울특별시도시기반시설본부
수신자	설비부장
(경유)
제 목	용역변경계약 체결 통보[마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 기계설비공사 TAB 기술용역]

1. 설비부-7922(2021.06.11)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 사업 계약(기간 연장)건에 대하여 아래와 같이 변경계약 체결하였음을 알려드립니다.

가. 계약건명 : 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 기계설비공사 TAB 기술용역

나. 변경사항 : 계약 기간

다. 변경사유 : 건축 공사기간 연장으로 인한 후속공정 순연

라. 변경계약 체결현황

구 분	당 초	변 경
공사업체	㈜일송엔지니어링기술사사무소	해당 없음
계약기간	2020.05.06.~2021.06.30.	2020.05.06.~2021.10.30.

※ 계약금액 변경없음

붙임 : 변경계약서 1부.  끝.

	총무부장
★주무관	이승민		재무과장	홍은미		총무부장	06/14 구본상
협조자
시행	총무부-10638	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 청계청사 11층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-2377	/전송	02-3708-2327	/	winman1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)