문서번호	시설과-5843
결재일자	2021. 6. 14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	시설관리부장
이준상	이승우	06/14 代김형준
협 조	급수설비과장		조임남
	누수방지과장		김형준

「중부,서부수도사업소 관내 상수도공사 건설사업관리용역」

설계변경 검토 보고(총차 4회, 3차 최종)

2021. 6.

상수도사업본부

시설과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『중부,서부수도사업소 관내 상수도공사 건설사업관리용역』

설계변경 검토 보고(총차 4회, 3차 최종)

「중부,서부수도사업소 관내 상수도공사 건설사업관리용역」과 관련하여 용역사로부터 계약물량 증·감에 의한 설계변경 요청이 있어 검토사항을 아래와 같이 보고 드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명: 중부,서부수도사업소 관내 상수도공사 건설사업관리용역

○ 계약상대자: *******************

○ 계약금액: ***************

○ 용역기간: ******************************************

○ 용역개요

- 급수공사 분야(급수공사,불용관,보호통교체, 포장 등) : 10,526건

- 누수복구 분야(누수복구,포장,동결관 정비 등) : 12,706건

- 시설물 분야(노후밸브교체,배수지 항청소 등) : 4,038건

□ 설계변경 사유

○ 변경사유: 기술인 근무일수 증,감에 따른 조정

공 종	규격	증감 물량		증·감
		당 초	변 경
고급기술인 - 주간	인.월	*****	*****	*******
중급기술인 - 주간	인.일	******	******	*******
초급기술인 - 주간	인.월	******	******	*******
중급(휴일 및 시간외)	인.월	******	******	******
초급(휴일 및 시간외)	인.월	******	******	*******

○ 차수별 계약금액 조정내역

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총차	*************	*************	************
1차	***********	***********	*
2차	*************	*************	*
3차(금회)	*************	*************	************

○ 사업별 계약금액 조정내역

구 분		당 초	변 경	증·감
계		*************	*************	************
급수	계	*************	*************	***********
	1차	***********	***********	*
	2차	***********	***********	*
	3차	***********	***********	***********
누수복구	계	*************	*************	*********
	1차	***********	***********	*
	2차	***********	***********	*
	3차	***********	***********	*********
시설물	계	***********	***********	************
	1차	***********	***********	*
	2차	***********	***********	*
	3차	***********	***********	************

□ 조치의견

○ 「2021년 상수도사업 계약심사 추진계획」에 의거 계약금액 조정 심사 미대상으로 부서 자체 심의위원회 개최 후 설계변경 시행코자 함.

붙임 : 1. 설계변경 요청 공문 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.