문서번호	원수관리과-1185
결재일자	2021. 6. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김종필		최양교	06/16 신동호
협 조

“상수도본부 발족 30년, 수돗물통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

「2022년도 예산편성, 강북통합취수장」

조류차단막 및 오일휀스 철거·설치 계획

2021.  6.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

「2022년도 예산편성, 강북통합취수장」

조류차단막 및 오일휀스 철거·설치 계획

취수탑 주변에 설치된 조류차단막 및 오일휀스를 매년 여름장마와 폭우로 인한 유실 및 훼손을 방지하고, 정수처리 피해를 취소화하기 위하여 장마전 철거 및 장마 이후 재설치하므로써 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 근 거

◦ 조류차단막 설치효과분석 및 관리계획 시달(수질65461-629/‘02.12.12.)

□ 시설현황

◦ 취수탑 : 2개소 (강북 105만톤, 구의·뚝도 125만톤)

- 규격 및 수량 : 25.7m × 9.8m × 2개소, 타원형

◦ 조류차단막 및 오일휀스

- 조류차단막 : 25t × 5m × 5m, 길이 320m

- 오일휀스 : 내수면용, 길이 540m

□ 추진계획

◦ 사 업 명 : 조류차단막 및 오일휀스 철거·설치공사

◦ 사업내용 : 취수원의 오염물질 유입을 억제하고 정수처리 피해 최소화를 위해 설치된 조류차단막 및 오일휀스를 장마철 유실방지 및 유지관리 등을 위해 철거·설치

◦ 규    모 : 조류차단막 철거·설치 320m, 오일휀스 철거·설치 540m

◦ 사업기간 : 2022. 3. ~ 11. 30.

◦ 사 업 비 : 94,000천원

- 조류차단막 : 170천원/m × 320m ≒ 54,520천원

- 오일휀스  :  73천원/m × 540m ≒ 39,480천원

◦ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,원수및취수비,수선유지교체비

□ 추진일정

◦ 설 계 : 2022. 3.

◦ 공사발주 및 계약 : 2022. 4.

구 분	일정(예정)	공사규모
철 거	5월~6월	- 조류차단막(25t×5m×5m) : 320m 오일휀스(내수면용) : 540m
설 치	9월~10월

◦ 공사착공 및 사업시행 : 2022. 5. ~ 11. 30

□ 기대효과

◦ 장마, 푹우시 협잡물 등으로 인한 취수 장애요인 사전 제거로 안정적인 취수환경 유지 및 조류차단막, 오일휀스 유실 방지

◦ 여름철 이후 조류차단막 및 오일휀스 재설치하여 정수처리에 지장을 초래하는 조류, 맛, 냄새물질, 기름 유입 등을 차단함으로써 정수처리 피해를 최소화.  끝.