문서번호	설비부-8293
결재일자	2021. 6. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		환경설비과장
정욱		06/16 김오열
협 조
	주무관		마권택

『시립동대문실버케어센터 건립 기계설비공사』 설계변경 소위원회 심의요청

2021. 6.

도시기반시설본부

[설비부]

설계변경 소(본부)위원회 자문요청서

문서번호

요청부서

설비부 담당 정욱

요청일

2021년 06월 15일

공 사 명

시립동대문실버케어센터 건립 기계설비공사(2차)

공사개요

공사규모

지하1층 / 지상4층, 연면적 2,990.95㎡

공사기간

2020. 11. 03 ~ 2021. 07. 04 (2차)

감 리 사

㈜펨코엔지니어링

설 계 사

㈜대경기술단

시 공 사

경문이엔지(주)

자문 안건명

설계변경에 의한 금액 증액

요청금액

***********

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 내용 : *********************

*******************

**************************

*************

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 별첨참조

▪ 물량 증감내역

- 별첨참조

▪ 공사비 증감내역                 (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감
기 계	*******	*******	*******

별첨서류

1. 건설사업관리단 설계변경 소위원회 심의자료 제출의 건 1부.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	시립동대문실버케어센터 건립 기계설비공사
계약금액	*********	***	************	***	********
공사기간	***************************	***	***********	***	******
계약형태	************************** ****************			***	********
공사규모	**************************			************** ************************

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	******** ******** ************ ******** ********		******** ******** ************ ******** ******** ************ ************ ************ ************	************* ************* ************* ************* ************* ************ ************* ************* *************
공 사 비	*********		*********	*************
적 용 요 율	낙찰율 85.594%		낙찰율 85.594%
설계변경요구자	☑ 발주처 □ 계약상대자
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인 : 도시기반시설본부 21-4565호(2021.04.29.) 도시기반시설본부 21-6190호(2021.06.09.)
	관련규정	지방자치단체입찰 및 계약집행기준 6절 공사계약일반조건(설계변경)
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	장비설치공사 증가, 위생기구공사 증가, 급수,급 탕 배관공사 증가, 환기덕트공사 증가, 가스배관공사 증가, 보일러 연도설치추가,2층주방설계용역추가, 고용지원개선비 추가, 전자카드단말기 추가
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행