투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(철근 수급 지연에 따른 공기 만회대책 수립 요청)

1. 업무지시현장 : 신상도 지하차도 확장공사 극동엔지니어링 주식회사

2. 작 성 일 자 : 2021-06-16 09:06:54

3. 지 시 내 용

가. 신상도감 2021-343호(2021.6.9.)와 관련입니다.

나. 최근 철근 파동으로 관급자재의 수급이 지연됨에 따라 약 4개월(구조물 공사 지연 2개월 + 동절기 2개월)의 공기 지연이 우려되는 바, 지하차도 구조물에 사용되는 자재에 강재를 병용하여 시공하는 등 공기 지연을 만회할 수 있는 대책을 조속히 수립하여 보고하여 주시기 바랍니다.

다. 아울러, 현재 지하차도 구조물 공사가 지연되고 있으므로 계측관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

주무관							이시연			방재시설과장					김태중					방재시설부장					06/16 박홍봉
협조자
시행			방재시설부-7844									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층															/
전화		02-3708-8764						/전송			02-3708-8756					/	siyeon0907@seoul.go.kr												/	대시민공개