문서번호	설비부-8305
결재일자	2021. 6. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		환경설비과장
정욱		06/16 김오열
협 조
	주무관		마권택

『시립동대문실버케어센터 건립 소방시설공사』 설계변경 소위원회 심의요청

2021. 6.

도시기반시설본부

[설비부]

설계변경 소(본부)위원회 자문요청서

문서번호		요청부서	설비부 담당 정 욱	요청일		2021년 06월 16일
공 사 명	시립동대문실버케어센터 건립 소방시설공사(2차)
공사개요	공사규모	지하1층 / 지상4층, 연면적 2,990.95㎡
	공사기간	2020. 12. 14. ~ 2021. 07. 04.(2차)
	감 리 사	㈜펨코엔지니어링
	설 계 사	㈜대경기술단
	시 공 사	금광전설(주)
자문 안건명		BF본인증 및 발주처 요구사항 반영을 위한 설계 변경 건			요청금액		***********
자문요청사유		☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형		☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 유지관리, 사용부서 요구 ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 북카페 증축, 발주처・BF인층업체・사용부서(어르신복지과) 요구사항, 예비준공검사 보완요청 사항 등을 반영하고자 추가 공사 필요
건설사업관리단 의견(요약) ○ 내용 : 위 설계변경 요약 내용과 같이 각 부서의 요구사항 수용과 국가화재안전기준 충족을 위하여 추가공사를 검토한 결과 적절한 것으로 사료됨.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 ******* ******************************************* ****************************** ************************************* ************************************ ******************************************** *************************************** ******** ************************************************ ******************************** ************************************
별첨서류	1. 건설사업관리단 설계변경 소위원회 심의자료 제출의 건 1부.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	시립동대문실버케어센터 건립 소방시설공사(2차)
계약금액	************	***	************	***	*******
공사기간	***************************	***	***********	***	******
계약형태	************************** ****************			***	********
공사규모	**************************			************** ************************

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	“별첨 참조”		“별첨 참조”	“별첨 참조”
공 사 비	*********		*********	*************
적 용 요 율	낙찰율 86.808%		낙찰율 86.808%
설계변경요구자	☑ 발주처 □ 계약상대자
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인 : 도시기반시설본부 21-6245호(2021.06.10.)
	관련규정	지방자치단체입찰 및 계약집행기준 6절 공사계약일반조건(설계변경)
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	******************************************* ****************************** ************************************* ************************************ ******************************************** *************************************** ************************************************ *************************************
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행