문서번호	시설과-5910
결재일자	2021. 6. 16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설관리부장
이준상		이승우	06/16 강호광
협 조
	주무관			조익승
	주무관			강은영
	주무관			김윤환
	주무관			김일구

“마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

『중부,서부수도사업소 관내 상수도공사 건설사업관리용역』

설계변경 심의위원회 결과보고

2021. 6.

상수도사업본부

(시설과)

『중부,서부수도사업소 관내 상수도공사 건설사업관리용역』    설계변경 심의위원회 결과보고

우리 본부에서 추진중인 「중부,서부수도사업소 관내 상수도공사 건설사업관리용역」 의 설계변경 심의위원회 개최결과를 보고드림.

□ 용역현황

❍ 용 역 명 : 중부,서부수도사업소 관내 상수도공사 건설사업관리용역

❍ 계약상대자: *******************

❍ 계약금액 : ****************************************

❍ 용역기간 : ************************************************

❍ 용역개요

- 급수공사 분야(급수공사,불용관,보호통교체,포장 등) : 10,526건

- 누수복구 분야(누수복구,포장,동결관 정비 등) : 12,706건

- 시설물 분야(노후밸브교체,배수지 항청소 등) : 4,038건

□ 설계변경 심의위원회 개최 현황

❍ 일   시: 2021. 6. 15.(화) 10:00

❍ 장   소: 4층 소회의실

❍ 위원회 구성

****************************

*****************************************

***********************

❍ 심의안건 : 설계변경 적정성 심의(총차 4회,3차 최종)

□ 설계변경 현황

❍ 설계변경 사유 : 기술인 근무일수 증․감에 따른 조정

공 종	규격	수 량
		당 초	변 경	증 감
고급기술인 - 주간	인.월	*****	*****	********
중급기술인 - 주간	인.월	******	******	********
초급기술인 - 주간	인.월	******	******	********
중급기술인 - 시간외	인.일	******	******	********
초급기술인 - 시간외	인.일	******	******	********

❍ 차수별 계약금액 조정내역

구 분	당 초	변 경	증 감
총 차	*************	*************	************
1차	***********	***********	*
2차	*************	*************	*
3차(금차)	*************	*************	************

□ 심의결과 : 원안 가결(적정)

위 검토자 : 설계변경 심의위원회

*******************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

***********************************************

□ 향후계획

❍ 설계변경 심의위원회 개최 결과 적정하여 원안대로 설계변경 시행

붙  임: 변경설계서 1부.  끝.