문서번호	토목부-11528
결재일자	2021. 6. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
이준범		代이성열	06/17 김용제
협조

차선분리대 설치 검토 보고

- 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 -

2021. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

차선분리대 설치 검토 보고

- 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 -

『고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사』의 실정보고(무단횡단 금지 휀스 설치)건과 관련 검토후 결과를 보고 드림.

******************

Ⅰ		관 련 근 거

□ 창덕궁감 2021-65호(2021.06.16.): 실정보고(무단횡단금지 휀스 설치 반영)

Ⅱ		사 업 개 요

□ 사 업 명: 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사

□ 규    모: 고덕교 차도확장(4차로→6차로), 교량접속 캔틸레버 보도

설치(교량 양측 각 B=2.5m)

□ 사업기간: ’19.01.18. ~ ’21.06.30.

□ 도 급 비: 2,754백만원

***********************

************************

Ⅲ		보 고 내 용

□ 강일교 하부~강동차고지 입구 차선분리대 설치(지속적인 민원 요청)

○ 당초 차선규제봉이 설치되어 있던 구간으로 차량의 불법유턴 방지 및 보행자 안전사고 예방을 위해 차선분리대 설치가 필요함.

○ 강동구청 교통행정과 요청사항(교통행정과-43541(`21. 5. 27.)

○ 관리부서인 동부도로사업소 도로보수과와 협의완료

□ 평면도

평면도

□ 현장사진

공사전
현재사진

□ 공사비 증감 현황

(단위 : 천원)

*****	****	****	***
***** *******	*	******	******
*******	*	******	******

□ 책임건설사업관리기술자 검토의견

○ 강동구 지역주민들의 지속적인 민원 및 강동구청 교통행정과의 요청사항으로 기존 차선규제봉 설치구간*************)에 불법유턴 방지 및 보행자 안전사고예방을 위한 차선분리대 설치는 타당함.

○ ***********************************************

Ⅳ		조 치 의 견

□ 지속적인 민원 및 강동구청 요청사항으로 불법유턴 방지 및 보행자 안전사고 예방을 위한 차선분리대 설치는 타당하며,

□ 추후 계약금액 조정시 공사 물량 및 단가, 금액을 확정코자 함.

붙임  실정보고(무단횡단금지 휀스 설치) 공문 1부.  끝.