문서번호	정수과-2887
결재일자	2021. 6. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
정승열		이해원	06/17 임정규
협조

『2022년 사업계획-염소시설 공정안전관리』

이행상태점검 대비 컨설팅 용역

2021. 6.

구의아리수정수센터

(정수과)

『2022년 사업계획-염소시설 공정안전관리』

이행상태점검 대비 컨설팅 용역

산업안전보건법 염소시설 공정안전관리(PSM) 현장 확인 후 1년이 지난 날부터 2년이내 이행상태 평가를 받아야 함에 따라 전문기관 컨설팅 용역을 실시하고자 예산을 반영하여  염소시설 공정안전관리에

만전을 기하고자함

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진근거

○ 산업안전보건법 제46조(공정안전보고서의 이행 등)

○ 산업안전보건법 시행규칙 제54조(공정안전보고서 이행 상태의 평가)

- 공정안전보고서의 확인 후 1년이 지난 날부터 2년이내에 이행상태 평가 실시

- 이행상태 평가 후 4년마다 이행상태평가 실시

□ 공정안전보고서(PSM) 추진현황

○ 염소시설 공정안전관리 용역 착수 : 2020. 4. 13

○ 공정안전보고서 제출 : 2020. 12. 15

○ 공정안전보고서 보완제출 : 2021. 3. 8

○ 공정안전보고서 심사결과 조건부 적합 : 2021. 3. 8

○ 공정안전보고서 현장 확인심사 및 조건부 사항 보완 : 2021. 6. 8

○ 공정안전보고서 확인심사 결과 적합 : 2021. 6. 8

Ⅱ		추 진 계 획

□ 용 역 명 : 염소시설 공정안전관리 이행상태점검 대비 컨설팅 용역

□ 기   간 : 계약일 ~ 12월

□ 대상시설

○ 대상물질 : 염소시설

물질명	물질구분	용도	시설용량	연간취급량	비고
*********	****** ******	***	***	****	****

□ 용역내용

○ 염소시설 공정안전관리 자체감사 실시

- 계획서 작성 및 이행여부 확인

- 감사 문제점 및 보고서 작성

○ 염소투입공정별 도면 업데이트 및 현장 일치화 작업

○ 작업 및 공사 등 변경관리 서류검토 및 이행

○ PSM 12대 요소별 실행서류 및 지침서 검토 보완•수정작업

○ 교육자료 작성 및 교육 실시

○ 이행상태 점검평가 대비 사전점검 계획서 작성 및 기술지원

□ ***************

○ 산출내역(세부내역 붙임 견적서 참조)

- **********************************************

**************************

○  예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

Ⅲ		향 후 계 획

○ 2022. 2월   : 계획수립

○ 2022. 3월 ~ 12월 : 용역시행

○ 2022. 10월 : 자체감사 실시

붙임  1. 이행상태 점검 평가항목별 배점기준표 1부.

2. 견적서1부.  끝.