문서번호	기전과-6329
결재일자	2021. 6. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이지영		06/17 배수웅
협조

『2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

설계변경(1회) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 6. 17.(목)

동부도로사업소

(기전과)

『2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

설계변경(1회) 검토 보고

2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)와 관련 감리업체로부터 제출된 설계변경 요청사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		관련근거

□ 2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가) 1차 작업지시 완료 보고   ○ ㈜협우지여엔지니어링 서교감 제21-36호(2021.05.26.)

□ 2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가) 2차 작업지시 완료 보고   ○ ㈜협우지여엔지니어링 서교감 제21-58호(2021.06.15.)

□ 2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가) 1차 설계변경 제출 건   ○ ㈜협우지여엔지니어링 서교감 제21-77호(2021.06.17.)

2		사업개요

□ 사 업 명 : 2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)

□ 사업내용 : 강남구, 서초구일부 교통신호기 유지보수

□ 사업기간 : 2021. 3. 29. ~ 12. 31.

□ 계 약 자 : ㈜보원전기 대표 정혜원

□ 계약금액 : 금454,677,300원(금사억오천사백육십칠만칠천삼백원정)

□ 감리업체 : ㈜협우지여엔지니어링 대표 김영곤

3		설계변경 내용

□ 설계변경 사유

○ 경찰청 교통안전시설물 규제사항 처리, 노후 신호지주, 시각장애인용 음향신호기 교체, 민원처리 등 일상유지 보수공사에 따른 내역이 변경됨에 따라 변경

□ 주요 물량 변경내역

연번	품 명	규 격	구분	단위	수량			금액(원)
					당초	변경	증,감	당초	변경	증감
1	제어기 완성품(표준형)	관급, 교차로용	신설	대	20	12	-8	10,581,100	6,348,660	-4.232.440
2	제어기 부분품(관급)	L.S.U	신설	EA	1	14	13	40,088	561,232	521.144
3	제어기 부분품(관급)	EXT Flash	신설	조	1	4	3	40,088	160,352	120,264
4	차량신호등 설치	LED, 1면3,4색(관급)1조	신설	조	10	2	-8	2,921,490	584,298	-2,337,192
5	차량신호등 설치	LED, 1면3,4색(관급)2조	신설	조	10	6	-4	5,258,680	3,155,208	-2,103,472
6	보행신호등 설치	사각/LED,1면2색(관급)	신설	조	10	14	4	890,890	1,247,246	356,356
7	차량신호등 이설	LED, 1면2,3,4색 (경보등포함), 1조	이설	조	1	26	25	946,563	24,610,638	23,664,075
8	보행신호등 이설	LED, 1면2,3색, 1조	이설	조	1	17	16	160,360	2,726,120	2,565,760
9	보행,잔여시간,보조등 철거	LED, 1면2,3색 (숫자,도형)	철거	조	1	9	8	44,544	400,896	356,352
10	시각장애인용 음향신호기	본체(사급)-밴드식,브라켓	신설	대	1	42	41	72,395	3,040,590	2,968,195
11	음향신호기 압버턴	압버턴(사급),밴드형, 브라켓(공통)	신설	EA	1	42	41	16,693	701,106	684,413
12	교통신호등지주 신설(관급)	관급,Ø250㎜×8M	신설	본	5	10	5	1,178,555	2,357,110	1,178,555
13	교통신호등지주 신설(관급	관급,Ø200㎜×8M	신설	본	5	21	16	1,178,555	4,949,931	3,771,376
14	교통신호등지주 신설(관급	관급,Ø150㎜×8M	신설	본	5	3	-2	1,178,555	707,133	-471,422
15	교통신호등지주 신설(관급	관급,Ø125㎜×4M	신설	본	5	10	5	1,178,555	2,357,110	1,178,555
16	지주부착대 설치(관급)	관급, 6M	신설	본	1	8	7	157,139	1,257,112	1,099,973
17	지주부착대 설치(관급)	관급, 5M	신설	본	5	9	4	785,695	1,414,251	628,556
18	지주부착대 철거-고재 별도	각종(용융,디자인,KS흑관), Ø80㎜×5M	철거	본	1	14	13	78,569	1,099,966	1,021,397
19	지주기초 및 앙카 - 개소추가시	Ø200㎜ (1.1m×1.1m×1.5m)	신설	조	1	8	7	784,707	6,277,656	5,492,949
20	지주기초 및 앙카 - 개소추가시	Ø125㎜ (0.8m×0.8m×1.2m)	신설	조	1	8	7	334,214	2,673,712	2,339,498
21	신호케이블	지중1선, F-CVV,1.5SQ/5C	신설	m	1	817	816	8,330	6,805,610	6,797,280
22	신호케이블	지중2선, F-CVV,1.5SQ/5C	신설	m	1	84	83	15,223	1,278,732	1,263,509
23	신호케이블	지중3선, F-CVV,1.5SQ/5C	신설	m	1	77	76	22,118	1,703,086	1,680,968
24	신호케이블	가공1선, F-CVV,1.5SQ/5C	신설	m	1	500	499	13,228	6,614,000	6,600,772
25	신호케이블	가공2선, F-CVV,1.5SQ/5C	신설	m	1	164	163	23,374	3,833,336	3,809,962
26	후강전선관 배관	Ø104㎜×3.6m, 2열	신설	m	1	72	71	90,599	6,523,128	6,432,529
27	아스팔트 횡단굴착	기계 80%+ 인력 20%, 2열	신설	m	1	65	64	48,976	3,183,440	3,134,464
28	소형고압블럭굴착배관	기계 80%+ 인력 20%, 1-2열배관	신설	m	1	75	74	20,970	1,572,750	1,551,780
※ 타 세부사항은 설계변경 내역서 참조

4		설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		변경전 금액	변경후 금액	증 / 감		비고
총공사비		***********	***********		-
도급비	공급가액	***********	***********		-
	부가가치세	***********	**********		-
	소 계	***********	***********		-

5		감리단 검토의견

□ 현장여건에 따른 물량변경 및 보험료 등 제경비 정산으로 설계변경 필요함.

6		보고자 의견

□ 감리업체로부터 접수된 설계변경에 대하여 검토한 결과 감리의견이 적정한 것으로 판단되어 설계변경을 승인하고 관리단속과에 변경계약을 의뢰하고자 함.

붙 임 : 1. 설계변경서류 제출 공문 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 검증 확인서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.