투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	공사 설계변경 계약 의뢰(전체 11회, 5차 4회-올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사)

우리 부에서 시행 중인 “올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사”에 대해 아래와 같이 설계변경(전체 11회, 5차4회) 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

2. 공 사 비 : *********************************

3. 공사기간 : ******************************************************

4. 시 공 사 : 대보건설(주) 외 2개사

5. 설계변경 현황(전체 11회, 5차 4회)

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
전체 (11회)	공 사 비	45,966,596,000	46,198,607,000	증) 232,011,000	총공사비
	공사기간	*****************************	*****************************	증)365일 (12.0개월)
5차 (4회)	공 사 비	8,627,634,000	8,498,354,000	감)129,280,000	도급비
	공사기간	*********************30. **************	*********************30. **************	변경없음

- 변경사유 : **********************************************************************

붙임 1. 설계변경 내역서(전체 11회, 5차 4회) 각 1부.

2. 설계변경 방침서 1부.

3. 감리단 검토의견서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	김선배		터널건설과장	代이상근		토목부장	06/17 김용제
협조자
시행	토목부-11523	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)