문서번호	교량안전과-9619
결재일자	2021. 6. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기술점검팀장	교량안전과장
신익현	위성환	06/18 한휘진
협 조

- 마포대교 안전난간설치공사-

준공기한 연기 검토 보고

2021. 06.

안 전 총 괄 실

(교량안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 마포대교 안전난간설치공사-

준공기한 연기 검토 보고

한강교량의 안전난간 확대설치를 위해 시행중인 마포대교 안전난간 설치공사의 시행중 현장여건을 반영하고 사용자의 안전성 추가 확보를 위한 보강 실시에 따른 준공기한 연기를 검토하여 보고 드림.

※ 관련근거 : 한강교량감 2021-307호(2021.06.14)

Ⅰ		사업 개요

○ 사 업 명 : 마포대교 안전난간 설치공사

○ 규    모 : 안전난간 설치 534.5m

○ 사업기간 : ’20.12.30. ~ ’21.06.27.

○ 도급금액 : 999,249천원(‘20년 재난관리기금)

○ 시 공 사 : ㈜삼일아이엠

○ 감 리 사 : ㈜동명기술공단

Ⅱ		추진 경과

○ ’19.09.06. ~ ’20.09.28. : 실시설계용역 시행

○ ’20.12.30. : 공사계약 및 착공

○ ’21.04.06. : 공장점검 및 자재검수 완료

○ ’21.05.31. : 534.5m중 200.0m 설치완료

Ⅲ		예산 현황

(단위 : 천원)

구 분	사 업 비	도 급 비	관 급 비	이 전 비
금 액	999,249	999,249	-	-

Ⅳ		건설사업관리단 검토결과

□ 검토내용

○ **********************

- *******************************************************

○ ******************************

- ***********************************************************************************************************************

******************************************

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 안전난간의 기능확보를 위한 추가 공정 발생으로 인한 소요공기 부족으로 공기연장이 필요

- ************************************************************

○ 연기사유

- 안전성 확보를 위한 추가 공정의 소요 절대 공기 확보

○ 변경내용

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	’20.12.30.~’21.06.27. (180일)	’20.12.30.~’21.08.31. (227일)	증) 47일

Ⅴ		검 토 결 과

○ 검토의견

- *******************************************************************************

○ 연기사유

- 추가 공종 시행에 따른 안전난간의 품질확보와 설치 목적 달성을 위해 절대공기 확보를 위한 사업기간의 변경 필요

- 귀책사유 : 서울시(지연배상금 미부과)

공사계약 일반조건 제6절(공사 설계의 변경) 3. 현장상태에 따른 설계변경

공사계약 일반조건 제9절(검사와 대가지급) 10. 불가항력으로 인하여 발생한 손해

Ⅵ		조치 계획

○ ******************************************************************************************************************************

- 변경내용

․ 공사기간 : 당초) ’20.12.30.~’21.06.27.

변경) ’20.12.30.~’21.08.31.

․ 공사금액 : 변경없음

붙임 1) 공사계약서(당초) 1부

2) 건설사업관리단 검토의견 및 관련공문 각 1부.  끝.