문서번호	기전과-6560
결재일자	2021. 6. 21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
김성균		서수일	06/21 김영철
협 조

『마포대교 경관조명 및 가로등설비 개선사업 전기공사』

실정보고(2차) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.  6.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

『마포대교 경관조명 및 가로등설비 개선사업 전기공사』

실정보고(2차) 검토보고

「마포대교 경관조명 및 가로등설비 개선사업 전기공사」시행 중 공사 감독대행 기관인 서울시설공단으로부터 공사 실정보고(2차) 승인요청 건이 접수되어 검토보고 드림.

1		관련 근거

공사 실정보고(2차) 승인요청

□ 서울시설공단 공사감독3처-5224(2021.6.16.)

2		공사 개요

공 사 명 : 마포대교 경관조명 및 가로등설비 개선사업 전기공사

위    치 : 마포대교(마포구 마포동 ~ 영등포구 여의도동)

계약금액 : *********************************

□ 선금지급액(2020년 12월) : *******************

- 도로시설물 경관조명 유지보수(시설비) : ***********

- 도로시설물 노후 조명시설 개선(시설비) : ***********

□ 사고이월액 : *********************************

- 도로시설물 경관조명 유지보수(시설비)

계약방법 : 일반경쟁입찰

계약상대자 : ********************

계 약 일 : 2020. 11. 16.

공사기간 : 2020. 11. 16. ~ 2021. 06. 30.

□ 당초 : 2020. 11. 16. ~ 2021. 02. 03.

공사규모 : 경관조명 및 가로등설비 개량 1식

□ 가로등기구 120개 교체(CMH → LED)

□ 기존 경관조명시설 철거 1식

□ LED 경관조명기구 설치 및 배관·배선공사 1식

공사감독 : 서울시설공단 공사감독3처 대행

3		현장 실정 사항

실정보고 내용

현 황	추진계획
현장여건에 따라 등기구 수량 및 케이블 설치 물량 등 변경 신규 물량(임시 컨테이너 임대 등) 발생	물량검측 후 설계변경 시행 제경비 정산
- 주요 변경 내용 · 0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) 2C 16㎟ 1,497m → 1,800m · 0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) 2C 10㎟ 2,296m → 1,580m · 0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) 2C 50㎟ 0m → 380m · 난연 비닐 절연 접지용전선(F-GV) 35㎟ 0m → 400m · 등기구 XL-F 설치(LED32W) 240개 → 274개 · 브라켓(XL-F용) 240개 → 274개 · 임시사무실(컨테이너) 임대 0식 → 1식

개략공사비 변경

(단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 · 감
총 공 사 비		***********	***********	*****************
도급비	공급가액	***********	***********	*****************
	부가가치세	**********	**********	*****************
	계	***********	***********	*****************

4		검토 의견

□ 감독대행처의 실정보고 사항을 검토한 결과, 현장 여건에 따라 등기구 및 케이블 물량을 변경하여 설치 추진하는 것이 당초 설계보다 경관조명 미관성 개선 및 사업완성도 측면에서 타당하다고 판단되며,

□ 시공물량이 증가하여도 바지선, 예선, 스카이차량 임대비용 절감 등으로 총 도급비는 감소하여 사업예산 범위 내임.

□ 상기 실정보고 사항에 따라 승인 회신한 후, 설계변경 검토보고 접수하여 변경계약 추진하고자 함.

붙임  공사 실정보고 승인 요청 공문 1식.  끝.