문서번호	시설관리과-3474
결재일자	2021. 6. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	시설부장		한강사업본부장
이민호	代이민호	박상보		06/21 신용목
협 조
	총무과장		이상이
	기획예산과장		안인숙

『2021년 한강공원 자전거도로 유지보수공사(연간단가)』

설계변경 시행(1회) 보고

2021. 6.

한 강 사 업 본 부

시 설 관 리 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『2021년 한강공원 자전거도로 유지보수공사(연간단가)』

설계변경 시행(1회)보고

『2021년 한강공원 자전거도로 유지보수공사』에 대하여 공사현장 여건 변경에 따른 공사물량 증·감사항 및 신규공종 사항이 있어 설계변경을 시행하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 2021년 한강공원 자전거도로 유지보수공사(연간단가)

❍ 위    치 : 한강공원 자전거도로 78km 전 구간

❍ 사업기간 : 2021. 3. 8. ~ 2021. 12. 31.

❍ 규    모

- 아스콘 포장 71a,  콘크리트 포장 15a, 보도포장 12a,

차선도색 8,000m, 난간개보수 250경간, 기타 부대공 1식 등

❍ 총 사업비 : 1,610,013천원

- 도급비 700,513천원, 관급비 868,284천원, 이전비 41,216천원

❍ 시 공 사 : 성안토건㈜  대표 박 정 원

2		설계변경 개요

❍ 변경 사유

- 보행환경개선을 위한 자전거도로와 보행로 분리시설 설치

· 보행폭 여유에 따라 녹지대 및 시선유도봉 설치

- 노후 아스팔트포장도로구간 정비

- 민원처리 및 공사여건등에 따른 신규공종 및 물량 증감사항 반영 등

- 설계변경자문위원회 심의결과 : 【조건부 가결】(붙임 참조)

❍ 주요 공종 수량변경내역

공 종	내 용	단위	당초	변경	증•감
포장공	아스콘 절삭후 덧씌우기	a	10	170	160(증)
포장공	아스팔트 포장 절단	m	50	3,000	2,500(증)
포장공	콘크리트 포장깨기	㎡	100	300	200(증)
시설물공	도로경계석 설치	m	200	3,020	2,820(증)
시설물공	콘크리트 타설	㎥	23	35	12(증)
부대공	차선도색	m	8,000	15,520	7,520(증)
부대공	차선제거	㎡	200	300	100(증)
부대공	차선규제봉 설치	개	300	5,400	5,100(증)
부대공	과속방지턱 도색	㎡	-	300	300(증)

❍ 설계변경 금액

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
총공사비	1,610,013,900	1,709,000,000	증 98,986,100
도 급 비	700,513,900	913,990,000	증 213,476,100
관급자재	868,284,000	753,794,000	감 114,490,000
이 설 비	41,216,000	41,216,000	-

3		조치계획

○ 공사비 증액분(98,986천원)에 대해서는 낙찰차액을 활용

○ 상기와 같이 설계변경 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

붙 임 :  1. 설계변경내역서 1부.

2. 계약금액 검증확인서 1부

3. 설계변경 자문위원회 심의결과보고 1부  끝.