문서번호	역사문화재과-11632
결재일자	2021. 6. 21.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

		시 민
주무관	한성백제팀장	역사문화재과장
이정아	오정숙	06/21 권순기

서울창의마을 풍납캠프

정밀안전진단 및 내진성능평가 추진계획(안)

2021. 6.

문화본부

(역사문화재과)

- 서울창의마을 풍납캠프 -

정밀안전진단 및 내진성능평가 추진계획(안)

서울창의마을 풍납캠프를 활용한 풍납동토성박물관 등 백제 역사·교육 핵심공간 조성사업 추진 관련 현 시설물에 대한 실측과 구조 안정성 및 보수‧보강방법 검토를 위해 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역을 추진하고자 함.

□ 추진배경

○ 풍납동토성박물관, 서울역사도서관 건립을 위한 공공건축 사업계획 사전검토 및 구조전문가 자문결과 반영

공공건축 사업계획 사전검토 결과 (’21.3.30. 도시공간개선단, 도시기반시설본부)	구조전문가 자문 결과 (전문가 자문 4회 실시, ’21. 4.~5.)
- ***************************************************************************	- ***************************************************************************************

□ 건축물 현황

○ 위    치 : 서울특별시 송파구 풍성로14길 45(풍납동 281-1)

○ ******************************************

○ 연 면 적 : 13,260.57㎡

○ 과업대상 : 가․나․다동, 식당동, 문화재연구동 (연면적 합계 : 12,508.98㎡)

※ 상가동, 경비실, 관리동, 가스창고, 연결복도 제외

□ 용역 추진계획

○ 과업기간 : 계약일로부터 60일

○ 과업 내용

<정밀안전진단>

- 실측도면 작성(배치도 및 건축도면, 구조도, 창호도 등)

- 현장조사 및 시험, 상태‧안전성평가 등 ｢시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 실시 등에 관한 지침｣ 제19조에 의한 정밀안전진단 과업내용

- 박물관·도서관·사회복지시설로 용도변경에 따른 구조 검토, 보수·보강방법 제시, 비용 산출 등

<내진성능평가>

- ｢기존 건축물의 내진성능평가 및 향상요령｣에 따른 내진성능평가

- 박물관·도서관·사회복지시설로 용도변경에 따른 내진보강설계(안) 제시, 비용 산출 등

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(적격심사)

- ｢시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법｣ 제28조에 따라 안전진단전문기관(건축분야 또는 종합분야)으로 등록된 자 중 제한경쟁입찰을 통해 사업자 선정

○ 소요예산 : 금130,160천원

- 예산과목 : 역사문화유산의 계승 발전, 문화재 보존 복원, 풍납동토성박물관 건립/서울역사도서관 건립, 시설비(401-01)

※***************************************

※ 기술용역 타당성 심사 결과에 따라 소요예산 및 과업지시서 변경 가능성 있음

□ 향후 계획

○ 기술용역 타당성 심사 요청(기술심사담당관)  : ’21. 6.

○ 계약의뢰 및 입찰공고(7일간)               : ’21. 7.

○ 적격심사 및 계약                          : ’21. 8.

○ 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 수행    : ’21. 8.~’21. 10.

붙임  1. 참고자료 1부.

2. 과업내용서(안) 1부.

3. 산출내역서(안) 1부.