문서번호	기전과-5051
결재일자	2021. 6. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		석대창	06/21 代한수영
협조
	주무관		조소현

‘21/22년 도로기전시설물 유지보수공사

작업지시 계획(3차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 6.

남부도로사업소

(기  전  과)

‘21/22년 도로기전시설물 유지보수공사

작업지시 계획(3차)

도로 기전시설물 점검 및 순찰결과 안전사고 발생 위험이 있는 시설물에 대한 보수를 실시하여, 기전시설물 관리에 만전을 기하고자 함

공사개요

○ 공 사 명 : ‘21/22년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사업체 : ****************

○ 공사기간 : 2021. 1.1 ~ 2022. 6.30

○ 공사금액 : *************

그간 추진사항

○ 1차 작업지시 내역

- 작업기간 : 2021. 3.10. ~ 3.31

- 작업내역

• 한남대교 누전선로 교체 238m

• 영등포역 고가 전선로 교체  378m

• 대방지하차도 소화기표시등 교체 1개소

○ 2차 작업지시 내역

- 작업기간 : 2021. 4.15. ~ 5.15

- 작업내역

• 가로등주26본 교체

• LED 가로등 33등 교체

• 가로등분전반 6면 교체

금회(3차) 작업지시 내역

작업내역	작업물량	위치	비고
LED 가로등 교체	- LED 가로등 75W×32등 - LED 가로등 100W×8등 - LED 가로등 125W×45등	- 선암(8), 염곡(13), 영등포(32)지하차도 - 영동1교(12), 수출의다리(20)
전력케이블 설치	- CV 6.0㎟×2C ×719M	- 호암2터널(재방송 증폭기 전원)
전력량계 교체	- 가로등 전력량계 4개소	- 도림천고가 3, 보라매고가 1

추진방법

○ LED 가로등기구 는 기 구매 완료한 등기구 사용 교체

○ 위 사항에 대하여 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업 지시 후 조치코자 함.

******************

- 작업기간 : 2021. 6.22. ~ 7.15.

향후계획

○ 위 공사 완료 후 설계 변경 및 기성(1차) 지급코자 함.

***********************

○ 추진일정

- ‘21. 6. 21	작업지시(3차)

- ‘21. 6. 25	설계변경(1차)

- ‘21. 7. 15	작업완료(3차)

- ‘21. 7. 20	기성지급(1차)

붙임 : 3차 작업내역서 1부. 끝.