문서번호	도로보수과-5956
결재일자	2021. 6. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	도로보수과장	동부도로사업소장
이창석	호경수	06/21 이규상
협 조
	주무관		송광석

설계변경(제1회) 검토 보고

『2021년 도로부속물 유지보수공사(연간단가)』

2021.  6.

동부도로사업소

(도로보수과)

설계변경(제1회) 검토 보고

『2021년 도로부속물 유지보수공사(연간단가)』

우리사업소에서 시행중인 『2021년 도로부속물 유지보수공사(연간단가)』와 관련하여 신규공종 발생 및 시공물량 증․감 등에 따른 제1회 설계변경 내역을 검토하여 보고드림

1		근 거

2021년 교통안전부속물 유지보수 사업 추진계획【도로보수과-1715(2021. 2.22.)호】

포장도로 긴급복구 정비대상 보고(밤고개로 외 8개 도로)【도로보수과-3606(2021. 4.12.)호】

중앙버스정류장 PC콘크리트 포장 계획【도로보수과-5289(2021. 6. 1.)호】

도로사면 보수·보강 계획 검토보고【도로보수과-5699(2021. 6.14.)호】

자전거도로 안전시설 확충사업 정비계획【도로보수과-5775(2021. 6.15.)호】

2		공사 개요

공 사 명: 2021년 도로부속물 유지보수공사(연간단가)

기    간: 2021. 1. 8. ~ 12. 20.

개    요: 미끄럼방지포장 2,900㎡, 시설물세척 7,698㎡, 중앙분리대연석 도색 300㎡, 기타 부대공 1식 등

공 사 비: **********************************

도 급 자: **********

3		설계변경 사유 및 내용

설계변경 사유

○ 교통안전부속물 유지보수 사업, 도로사면 보수·보강, 자전거도로 안전시설 확충사업 추진에 따른 신규공종 발생 및 설계반영

○ 현장여건에 따른 기 계약공종 물량조정

○ 도로포장에 따른 횡그루빙, 무단횡단방지시설 재설치, 자전거도로 경계석 정비 물량 등 반영

주요 물량변경 내용

공 종	단위	당초 물량	변경 물량	증 ․ 감	비고
**********	*	*****	***	******	*****
**********	*	*****	*****	*****
********	*	**	**	*****
************	*	***	***	*****
********	*	*	**	****	*****
***********	*	*	**	****
***********	*	*	*	***
***********	*	*	***	*****
***********	*	*	***	*****
**************	**	*	***	*****
******	**	*	*	***	****
**********	*	*	**	****
**************	*	*	*****	*******
*************	*	*	**	****	*****

공사비 변경 내용

(단위:원)

구 분	당 초 설 계	변 경 설 계	증 ․ 감	비고
총 공 사 비	************	************	**************
도 급 비	************	************	*************
관급자재비	***********	***********	*************
이전비 및 기타	**	***********	*************

4		조치 계획

붙임 설계변경 도서에 의거 설계변경 시행

추가예산 반영

○ 예산과목

- 교통운영과, 도시교통 체계 및 소통 개선, 교통안전 시설물 관리(교통관리계정), 교통안전관련 도로부속물 유지관리, 시설비***********

- 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물관리(일반회계), 도로사면 붕괴 예방을 위한 보수,보강, 시설비***********

- 자전거정책과, 자전거이용 활성화 및 교통환경 개선, 자전거 이용시설 확충 및 관리, 자전거 도로 안전시설 확충, 시설비**********

붙임  1. 설계변경(제1회) 내역서 1부.

2. 설계변경(제1회) 사유서 1부.

3. 관련 방침서 각1부.  끝.