문서번호	도로보수과-2934
결재일자	2021. 6. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
박세준		06/22 한정환
협조

2021년 노후포장도로정비 강서2구역 노면표시공사

설계변경 검토 보고(제1회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 6.

강서도로사업소

(도로보수과)

2021년 노후포장도로정비 강서2구역 노면표시공사

설계변경 검토 보고(제1회)

우리 사업소에서 시행 중인『2021년 노후포장도로정비 강서2구역 노면표시 공사』설계변경 사항을 보고 드림

1		관련근거

○ 제1회 설계변경 내역서(강서2구역) 제출(2104-강서-13호, 인스펙트)

2		공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 노후포장도로정비 강서2구역 노면표시공사

○ 공사규모 : 차선도색 L=120,590m,

○ 공사기간 : ’21.4.19 ~ ’21.12.31

○ 사 업 비 : *********

*******************************

○ 도 급 자 : ***********

3		공사 수량 및 공사비 증·감 사항

○ 현장 여건 변화에 따른 공사 수량 증·감

공 종		단 위	수 량		증 , 감
			당 초	변 경
1	차선도색(백,황,청,분홍색) : 5종	*	******	******	**********
2	차선도색(백,황,청,분홍색) : 4종	*	******	******	**********
3	차선 재도색(백,황,청,분홍색) : 4종	*	*****	***	**********
4	차선 밑그림(백,황,문자,기호)	*	******	******	**********

○ 공사비 증·감 : ******

4		조치계획

○ 상기 내용에 대하여는 설계변경 계약 후 정산 처리하고자 함

붙임 : 1) 책임감리 검토 보고서 1부.

2) 설계변경서 1부.  끝.