문서번호	시설관리과-10869
결재일자	2021. 6. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장
최형진	김성호	06/22 이태형
협 조

『월계3중블록 무단수 급수체계 구축공사』

현   장   실   정   보   고

2021. 6. 21.

북부수도사업소

시설관리과

『월계3중블록 무단수 급수체계 구축공사』

현  장  실  정  보  고

『월계3중블록 무단수 급수체계 구축공사』와 관련하여 감독업무 수행중인 *******으로부터 현장실정 보고서(***************가 제출되어 검토결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 현장 실정보고서 제출(공사감독2처-5678, 2021. 6. 11.)

공사현황

〇 공 사 명 : 월계3중블록 무단수 급수체계 구축공사

〇 공사개요 : D = 250~400mm, L = 1,083m

〇 계약기간 : 2021. 4. 28. ~ 2021. 12. 23.

〇 도 급 비 :*************

〇 도 급 자 :**************

보고내용

〇 중간집하장 변경

- 당초 설계는 중간집하장 위치가 공사현장 반경 3km로 지정되어있으나, 현장 반경 3km이내에는 적합한 중간 집하장 부지를 찾을 수 없어 변경이 필요한 실정임.

- 중간집하장  당초 : ***

변경 : ******************************

위치도(운반거리)	중간집하장 현장사진

- 위치도(운반거리) 및 현장사진

〇 잔토처리장 변경

- 공사장에서 발생된 잔토는 수도권 매립지로 반출토록 설계하였으나, 수도권 매립지의 매립지 현장정비 등에 따라 토사반입 불가 통보로 인해 잔토처리장(사토장) 변경이 필요한 실정임.

※ 관련근거 : 토사 반입불가 회신(매립부-1101호, 2021. 5. 6.)

- 잔토처리장  당초 : *************

변경 : ***********************

- 위치도(운반거리) 및 현장사진

위치도(운반거리)	잔토처리장 현장사진

검토결과

〇 중간집하장 변경검토

- 야간시간대 사토장 진출입이 불가함에 따라  토사 적치 공간이 확보된  중간집하장으로의 변경이 적정하고,

- 건설폐기물 업체 선정 및 계약 지연으로 인한 발생된 건설폐기물을 중간처리장에 집하 후 건설폐기물 처리용역업체 계약 착수 후 처리하고, 이후 발생되는 건설폐기물은 현장에서 폐기물처리장으로 직접 처리함이 타당함.

· 운반거리 및 운반비 변경 내역

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
거 리	**	****	*******
운반비	*******	*******	**********

〇 잔토처리장 변경검토

- 잔토처리장 변경 대상지는 포천시로부터 허가를 득한 농지조성지로 잔토(발생토)처리장으로 적정하다고 판단됨

- ******************************************

· 운반거리 및 운반비 변경 내역

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
거 리	*****	*****	********
운반비	*******	*******	*********

조치계획

〇 시설관리공단 실정보고 검토보고 내용이 타당하므로 원활한 공사시행을 위해 중간집하장 및 잔토처리장 변경을 승인하고 변경 내역에 대하여는 추후 설계변경에 반영토록 통보하고자 함.

붙임 : 현장실정 보고서 1부.  끝.