문서번호	토목부-11829
결재일자	2021. 6. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		토목총괄과장	토목부장
조동협		진재섭	06/22 김용제
협조

제2자유로 종점부 입체화 공사

하수관로 및 PC암거 이설구간 매립폐기물 추가 발생 처리방안 검토 보고

2021. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

제2자유로 종점부 입체화 공사

하수관로 및 PC암거 이설구간 매립폐기물 추가 발생 처리방안 검토 보고

지하차도 건설로 인한 하수관로 및 PC암거 이설작업시 과거 매립된 폐기물이 발생되어 이에 대한 처리방안 검토 보고임.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 제2자유로 종점부 입체화 공사

❍ 위    치 : 마포구 상암동 월드컵경기장 사거리

❍ 규    모

- 지하차도 신설(폭 4차로, 연장 540m)

- 도로확폭(양방향 각 1개 차로, 총연장 582m)

❍ 총공사비 : 47,352백만원(공사비 40,993, 관급자재 5,713, 감리비 22, 폐기물 624)

❍ 공사기간 : 2019. 8. 1 ~ 2022. 1.29

❍ 시 공 사 / 건설사업관리 : 삼부토건(주) / 동부엔지니어링(주)

□ 보고내용

❍ 본 건설공사로 인해****************************************************************************************

❍ ************************************************************************************************

- 매립폐기물 분포지역 중 발생 위치

- 매립폐기물 추가발생 현황

․ ① 구간(하수관로)

․ ② 구간(하수관로)

․ ③ 구간(PC암거)

- 매립폐기물 발생 현황 집계

□ 공사비 증․감 검토

❍ 공사비 증․감 현황                        (단위 : 단가 / 원, 금액 / 천원)

공 종	규 격	단위	당 초			변 경			증 ∙ 감		비고
			수량	단가	금액	수량	단가	금액	수량	금액
6. 부대공
6.02 환경관리비
d-3. 폐기물상차비	매립폐기물	ton	-	817.1	-	11,077	817.1	9,051	11,077	9,051
d-5. 매립폐기물운반		ton	-	9,493	-	11,077	9,493	105,154	11,077	105,154
직접공사비		식			-			114,205		114,205
제 잡 비		식			-			23,840		23,840
a.폐기물처리(매립폐기물)		ton	-	52,144	-	11,077	52,144	577,599	11,077	577,599
공 급 가 액		식			-			715,644		715,644
부 가 가 치 세		식			-			71,564		71,564
도 급 공 사 비		식			-			787,208		787,208
관 급 자 재 비		식			-			-		-
총 공 사 비		식			-			787,208		787,208

□ 검토결과

❍ *************************************************

❍ 물량 증가에 따른 계약금액 조정은 우리부 설계변경자문위원회(소위원회) 자문을 득한 후 그 결과에 따라 반영하고자 함.

붙임 건설사업관리자 검토의견서 1부. 끝