문서번호	토목부-11767
결재일자	2021. 6. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		장종환	06/22 김용제
협조	주무관		황윤기
	주무관		노순재

설계변경(전체14회, 8차3회) 검토 보고

- 동부간선도로 확장공사(1공구) -

2021.06.

도시기반시설본부

토목부

설계변경(전체14회, 8차3회) 검토 보고

- 동부간선도로 확장공사(1공구) -

교통규제심의(변경) 협의에 따라 교통안전시설물에 대한 변경사항을 설계에 반영하고 이를 시공하기 위한 기간을 확보하고자 설계변경을 보고드림.

【관련근거: 도화(감리) 2021-9302호(2021.06.16.)】

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 동부간선도로 확장공사(1공구)

○ 공사규모 : 도로 확장 4차로→6차로, 연장 1.4km

○ 도 급 비 : 31,360백만원(8차 12,411백만원)

○ 공사기간 : ‘07.10. ~ ‘21.06.(8차 ‘20.01. ~ ‘21.06.)

○ 시 공 사 : ㈜풍산건설 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링

Ⅱ		설계변경 및 주요내용

○ 설계변경 현황【전체14회, 8차3회)】               (단위 : 백만원)

구 분		당 초	변 경	증·감(△)	비고
전체 14회	도급액	35,821	35,821	-
	공사기간	2007.10.17. ～ 2021.06.30.	2007.10.17. ～ 2021.07.15.	증) 15일
8차 3회	도급액	15,953	15,953	-
	공사기간	2020.01.31. ～ 2021.06.30.	2020.01.31. ～ 2021.07.15.	증) 15일

○ 공사기간 연장 사유
- 교통규제심의(변경) 협의(교통관리과-11820호, ‘21.06.03.) 결과에

따른 교통안전시설물 시공기간 필요

- 유관기관(인수기관) 합동점검 후 요청사항 반영 기간 필요

○ 감리단 종합 검토 의견

- 교통안시설물에 대한 설계 변경 및 시공을 위한 절대공기가 부족하여 공사기간 연장이 필요하여 반영하는 것이 타당함.

Ⅲ		조치계획

○ 동부간선도로 확장공사(1공구) 설계변경 관련 감리단 검토의견이  타당하여 설계변경을 시행하고자 함.

붙임  감리단 검토 의견서 1부.  끝.