문서번호	설비부-8723
결재일자	2021. 6. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박근형		오삼록	06/23 김호성
협조
	주무관		정인석

『시립청소년 음악창작센터 건립공사』

설비분야 준공기한 연장 검토 보고

2021. 6.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『시립청소년 음악창작센터 건립공사』

설비분야 준공기한 연장 검토 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『시립청소년 음악창작센터 건립 공사』설비분야(기계,통신,소방) 준공기한 연장에 대하여 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

○ 공 사 명 : 시립청소년 음악창작센터 건립 공사(기계,통신,소방)

○ ***********************************

○ ******************************************

○ ****

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
******	**** ****	**	***********************	***********
		**	***********************	**********
******	**** ***	**	***********************	***********
		**	***********************	**********
****	*****	**	***********************	***********
		**	***********************	**********

○ ***********************************

Ⅱ		관련근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 (제8절 2.계약기간의 연장)

○ 설비분야 공사기간 연장요청 검토 보고 (기계, 통신, 소방공사)

[시립CM제2021-188호 ('21.06.17.)]

Ⅲ		검토내용

○ ****

계약번호 (납품요구번호)	계약자	계약건명	차수	계약금액(원)	준공(납품)기한
					당초	변경(연장)
**************	**** ****	******	**	***********	***********	****
			**	**********	***********	***********
**************	**** ***	******	**	***********	***********	****
			**	**********	***********	***********
**************	*****	****	**	***********	***********	****
			**	**********	***********	***********

○ 변경사유 : 선행공정(건축) 공사기간 연장에 따른 후속공정 기간 연장

○ 건설사업관리인 검토의견

- 선행 공정(건축)총차 공사기간 연장으로 후속 공정 설비분야(기계,통신,소방) 공사 준공기한 연장이 적정하다고 사료됨.

○ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 계약금액 : 변동없음

Ⅳ		보고자의견

○ 건설사업관리기술인의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 설비분야준공기한 연장을 계약부서(총무부)에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임  건설사업관리단 공문 1부.  끝.