문서번호	시설과-2683
결재일자	2021. 6. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설과장
김민주	김석광	06/23 권종화

『2021년 CCTV시스템 유지보수공사』 설계변경 계획보고

2021. 6.

중부공원녹지사업소

(시설과)

『2021년 CCTV시스템 유지보수공사』

설계변경 계획보고

『2021년 CCTV시스템 유지보수공사』시행과 관련하여 설계도서 검토 및

현장여건 변화 등에 따른 설계변경을 시행하고자 함

□ 관련근거

❍ 공사 실정보고[시설과-2647(2021. 6. 21.)]

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 2021년 CCTV시스템 유지보수공사

*****************************

*************************

❍ 계약일자 : 2021. 2. 15.

❍ 공사기간 : 2021. 2. 16 ~ 2021. 12. 21.

□ 설계변경 주요사유

❍ 남산 및 산하공원 CCTV 일상 유지보수 중 작업 물량 변경

□ 설계변경 내용

❍ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		변경 전	변경 후	증 감	비고
도급비	계	금27,900,000원	금27,900,000원	-
	공급금액	금25,363,637원	금25,363,637원	-
	부가가치세	금2,536,363원	금2,536,363원	-

❍ 주요 물량변경 내역

구 분	증·감	비 고
케이블 점검	증)9회선
제어함체 점검	증)36대
안내판 철거 및 설치	증)23개
카메라 AS(일반형)	감)4대
카메라 AS(스피드돔형)	감)5대

□ 보고자 의견

❍ 위 상기 변경사항에 대하여 설계변경 계약 시행하고자 함.

붙임 1. 실정보고서(1차) 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 검증확인서 1부.  끝.