문서번호	시설관리과-14898
결재일자	2021. 6. 18.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장		동부수도사업소장
김동구	김대용	송병욱		06/18 代김광식
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

「2020년 휘경동 외 4개동 수도공사(장기계속단가계약)」

설계변경(최종) 조치 계획 보고

2021. 6.

동부수도사업소

시 설 관 리 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

「2020년 휘경동 외 4개동 상수도공사(장기계속단가계약)」

설계변경(최종) 추진계획 보고

『2020년 휘경동 외 4개동 상수도공사』와 관련 신규 공정 및 시공물량 증감 등에 따른 설계변경(최종) 추진계획을 보고 드림.

Ⅰ		공사현황

□ 공 사 명: 2020년 휘경동 외 4개동 상수도공사(장기계속단가계약)

□ 공사개요

○ 당초: D=13~300mm, L=1,475m

○ 변경: D=13~300mm, L=1,846m(증 371m)

□ 계약상대자: ***************

□ 계약기간: 2020. 6. 5.~  2021. 6. 30.

□ 도급금액

○ 당초: ************

○ 변경: ********************************]

Ⅱ		관련근거

□ 지방계약법제22조 및 동법 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 공사계약에서 설계 변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생하였을 때에는 법 제22조제1항에 따라 해당 계약금액을 조정한다.

□ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 행정자치부 예규 제135호(2020.12.30.)

Ⅲ		설계변경

□ 설계변경 사유

○ 현장여건 변화에 따른 시공물량 증·감, 신규공종 및 사급자재 발생

□ 설계변경 세부내역

○ 시공물량 증,감 현황

- 증가: 콘크리트 포장깨기(굴삭기(타이어) 0.18㎥) 등 232개 공종

- 감소: 아스팔트포장절단(200㎜ 이하) 등 175개 공종

○ 신규공종 및 신규 사급자재발생

- 신규공종: 아스팔트깨기 소형브레이커(야간) 등 13개 공종

- 신규자재: 이경티(40/25) 등 3종

○ 주요공종 세부 변경내역: 따로붙임 설계변경 내역서 참조

- 산재, 고용보험료 등 제경비 변경

Ⅳ		계약금액 조정

구 분	공사금액(원)		비고(증·감)
	당 초	변 경
도 급 비	***********	***********	*************

Ⅴ		조치계획

□ 상기 설계변경건에 대하여 「2020년 상수도사업 계약심사 추진계획(안전총괄과-660, ‘20.1.17.호)에 의거 본부 안전총괄과에 설계변경 심사 의뢰 후 심의결과를 반영하여 설계변경을 시행코자 함.

붙임  설계변경 내역서 1부.  끝.