코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	지진체험 시설물 제작설치 금액변경 및 기간연장 변경계약 계획 보고

1. 관련근거

가. 지방계약법 제22조, 동법 시행령 제73조~제75조, 동법 시행규칙 제72조~제74조,

지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제13장~제15장(행안부 예규)

나. 소방행정과-2478(2021. 3. 8.)“2021년 지진체험시설 등 공사 기본계획”

다. 소방행정과-5114(2021. 5.17.) “영등포소방서 지진체험시설 제작 설치 구매

계약체결 결과보고”

라. ㈜창조인********1-01(2021. 6.22.) “영등포소방서 지진체험시설 제작 설치          구매 금액 및 기간연장 계약변경 요청”

2. 우리서 지진체험시설 제작 설치구매 금액변경 및 공사 기간연장 요청에 따른 변경계약

계획을 아래와 같이 보고합니다.

가. 변경내용

1) 지진체험시설 규격변경에 따른 계약금액 변경

2) 철강재 공급부족으로 인한 세계철강재 재료가격 상승반영

3) 규격변경 및 우천으로 인한 준공기한 지연 등 연장

나. 계약금액 변경

1) 변경전 : *****************************

2) 변경후 : *****************************

※ 증가액 : *********************

다. 공사기간 변경

1) 변경전 : ***************************

2) 변경후 : ***************************

붙임  1. 지진체험시설물 제작구매 설계변경 요청공문 1부.

2. 지진체험시설물 제작설치구매 변경내역서 1부.

3. 지진체험시설물 변경도면 1부.

4. 지진체험시설물 제작설치구매 실정보고서(증감내역포함) 1부.

5. 합의각서 1부.

6. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

★담당자	유희장		장비회계팀장	변경인		소방행정과장	김승기		소방서장	06/21 권태미
협조자	담당자	임준환		홍보교육팀장	김금호
시행	소방행정과-6531	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화		/전송		/		/	부분공개(5)