문서번호	설비부-8575
결재일자	2021. 6. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	환경설비과장	설비부장
임재욱	김오열	06/21 김호성

『시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사』

전기안전관리대행 계약 검토보고

2021. 6.

도시기반시설본부

(설  비  부)

『시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사』

전기안전관리대행 계약 검토보고

『시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사』와 관련하여, 준공시점이 다가옴에 따라 전기설비 사용 준비에 따른 사용전검사를 수행하기 위해 전기안전관리 대행(안전관리자 선임)을 계약하고자 검토보고 드림

소액(2개월,80만원)이므로 본 사업 책임감리원이 추천한 전기안전관리대행 업체인 ㈜하나전기안전관리와 수의계약 추진

Ⅰ		관 련 근 거

▢『전기안전관리법』제22조 및 동법 시행규칙 제26조

○ 자가용전기설비 소유자 또는 점유자는 전기안전관리자를 선임하여야 함

○ 용량 1천킬로와트 미만의 전기수용설비는 전기안전관리대행사업자에게 위탁 가능

▢ 전기공사 실정보고(전기안전관리자 선임 요청) 제출

: PC21(동대문 실버케어)-699호(2021.6.16.)

Ⅱ		검 토 내 용

▢ 전기안전관리자 선임 검토

○ 대상시설 : 시립동대문 실버케어센터 전기설비는 수전용량 500kW, 발전설비 130kW인 자가용전기설비로 전기안전관리법에 따라 전기안전관리자를 선임해야 되는 의무대상 시설임

○ 선임자격 : 전기산업기사 이상 자격소지자 1명 이상

○ 추진방향 : 전기안전관리대행 업체와 전기안전관리에 관한 업무 대행을 계약

- 사업의뢰부서(어르신복지과)에서 시립동대문 실버케어센터의 운영기관 선정 및 계약이 지연되고 있어 센터 소속의 전기안전관리자를 바로 선임할 수 없으며,

- 전기안전관리법 시행규칙 제26조에 의거 용량 1천kW 미만의 전기수용설비는 전기안전관리의 업무 대행(안전관리자 선임 포함)이 가능하므로 대행업체와 단기(2개월) 계약하여 전기안전관리자를 선임 조치하고자 함

○ 대행기간 : `21. 6. 21.~ `21. 8. 20.(2개월)

- 준공시설물 인계 시점 등을 고려하여 필요 시에는 1개월 단위로 연장함

구분	전기 사용전검사	한전 수전 (전기공급)	시설물 인계	비고
일정	‵21. 6. 22.	‵21. 6. 25.	‵21. 8월 중순	당초‵21.7.4. 준공 예정이었으나 건축공사의 지연으로 공기연장 예정(40∼50일)

○ 소요예산 : ********************

○ 대행업체 선정 : (주)하나전기안전관리

- 건설사업관리단에서 안전관리대행 업무 수행이 우수하여 추천한 전기안전관리대행 업체(3개사)와 한국전기안전공사의 대행 수수료를 비교하여 가격의 적정성과 단기계약조건 등을 고려하여 전기안전관리자 즉시 선임이 가능한 업체로 선정함

업체명	한국전기안전공사	대행사업자 1 (하나전기안전관리)	대행사업자 2 (한미전기안전관리)	대행사업자 3 (신한기술단)
대행수수료 (용량 630KW, 월3회점검 기준)	**********	**********	**********	**********

Ⅲ		조 치 계 획

▢ 시립동대문실버케어센터 전기 시설물에 대하여 준공 및 시설물 인계 전까지 전기안전관리 대행 업체로 하여금 전기안전관리업무(안전관리자 선임 포함)를 대행하도록 하며, 시설물 인계 시에는 시설 운영주체(어르신복지과)에게 관리하도록 이관 조치함

▢ 전기안전관리자 위탁 선임 비용(대행 수수료)은 계약기간 중 매월 대행 업체의 대금 청구서에 의거 지급하고자 함.

붙 임 1. 건설사업관리기술단 공문 1부.
2. 전기안전관리 대행 계약서 및 단가조사(견적서) 3부.  끝.