문서번호	배수과-5558
결재일자	2021. 6. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
박종혁		김근용	06/22 代송헌영
협 조
	주무관			정연준
	주무관			최진규
	주무관			이재학

「서울시 장기사용 상수관로 직접조사 용역(중부,서부,강서)」 설계변경 계획 보고

2021. 6.

상수도사업본부

[급수부]

「서울시 장기사용 상수관로 직접조사 용역(중부,서부,강서)」

설계변경 계획 보고

장기사용 상수도관 직접조사 용역에 대한 물량 증감과 신규 공종 발생에 따른 설계변경 계획을 보고 드림

□ 용역 현황

❍ 용 역 명: 서울시 장기사용 상수관로 직접조사 용역(중부,서부,강서)

❍ 과업내용: D400㎜ 이상 상수도관 직접조사(154㎞),

물성시험(10개소)

촬영장비 구성	공기밸브 탈거 후 촬영용 단관 설치	카메라 부착	영상촬영

❍ 계 약 자: ㈜**********

❍ 계약금액: ********************************

❍ 계약기간:****************************************

□ 설계변경 개요

❍ 변경 금액: ********************************

❍ 설계변경 사유

- 용역변경에 따른 공종별 물량 감소 발생

- 과업 내용이 계약 내역에 누락된 신규 공종 반영

※ 「장기사용 상수도관 직접조사 용역 변경계획(배수과-3979, ’21. 4. 28.」) 과 직접조사용역 실정보고(한빅 21-261, ’21. 6. 22.)」반영

□ 조치 계획

❍ 설계변경 심의위원회 개최 및 의결 결과에 따라 계약금액 조정

	<설계변경 심의위원회 개최>
- 일 시: ’21. 6. 23.(수) 10:00 - 장 소: 본부 4층 소회의실 - 대 상: 배수과장, 계획설계과(이재학), 급수운영과(최진규), 급수설비과(정연준), 담당자

❍ 계약금액 조정에 따른 선금 반환 고지의뢰(요금제도과)

붙임: 1. 실정보고서 1부.

2. 설계변경 심의 설명서(의결서) 1부.  끝.