“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	계약금액조정 결과 통보[2020년 등촌1동외 8개동 상수도공사]

1. 강서 시설관리과-11706호(2021.6.18.)와 관련입니다.

2. 위 호로 심사 요청한 『2020년 등촌1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)』의 계약금액조정 결과를 붙임과 같이 통보합니다.

가. 심사결과 현황                                             (단위:천원)

심사요청금액	심사조정금액	증 ․ 감	비 고
증)24,192	증)23,950	감)242	-

붙임 : 1. 계약금액조정 검토결과서 1부

2. (조정)설계변경내역서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	강서수도사업소장(행정지원과장),강서수도사업소장(시설관리과장)
주무관	이창희		안전조사과장	06/23 김분숙
협조자
시행	안전조사과-5916	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02)3146-1648	/전송	02)3146-1659	/	accent100@seoul.go.kr	/	대시민공개