문서번호	배수과-5570
결재일자	2021. 6. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
박종혁		김근용	06/23 신용철
협 조

「서울시 장기사용 상수관로 직접조사 용역(중부,서부,강서)」 설계변경 심의 결과보고

2021. 6.

상수도사업본부

[급수부]

「서울시 장기사용 상수관로 직접조사 용역(중부, 서부, 강서)」

설계변경 심의 결과보고

장기사용 상수도관 직접조사 용역에 대한 물량 증감과 신규 공종 발생에 따른 설계변경 심의위원회를 개최 후 결과를 보고 드림

□ 용역 현황

❍ 용 역 명: 서울시 장기사용 상수관로 직접조사 용역(중부,서부,강서)

❍ 과업내용: D400㎜ 이상 상수도관 직접조사(154㎞),

물성시험(10개소)

촬영장비 구성	공기밸브 탈거 후 촬영용 단관 설치	카메라 부착	영상촬영

❍ 계 약 자: ㈜**********

❍ 계약금액: ********************************

❍ 계약기간:****************************************

□ 설계변경 개요

❍ 변경 금액: ********************************

❍ 설계변경 사유

- 용역변경에 따른 공종별 물량 감소 발생

- 과업 내용상의 신규 공종 반영

※ 「장기사용 상수도관 직접조사 용역 변경계획(배수과-3979, ’21. 4. 28.」) 과 직접조사용역 실정보고(한빅 21-261, ’21. 6. 22.)」반영

□ 심의위원회 개최결과

❍ 일  시(장소): ’21. 6. 23.(수) 10:00(본부 4층 소회의실)

❍ 위원회 구성: 배수과장, 계획설계과(이재학), 급수운영과(최진규), 급수설비과(정연준), 담당자(박종혁)

❍ 심의 내용: 용역 계약물량 증감 및 적용 단가 타당성 심의

❍ 심의 결과: 설계변경 심의 안건 검토결과 적정함(붙임1 의결서)

□ 행정 사항

❍ 심의위원회 결과, 상정안건 적정함 의결 내용에 따라 설계변경 계약 의뢰(재무회계과)

붙임: 1. 심의 의결서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.