문서번호	공공재생과-5261
결재일자	2021. 6. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공공재생정책팀장	공공재생과장
이아름		代김지호	06/23 이동일
협조

서울로2단계 연결길 조성사업 통합브랜드 개발 및 안내시설물 제작·설치

용역 기간연장 검토 보고

2021. 6.

도시재생실

(공공재생과)

서울로2단계 연결길 통합브랜드 개발 및 안내시설물 제작·설치

용역 계약 변경 검토 보고

서울로2단계 연결길 통합브랜드 디자인 개발 및 안내시설물 제작·설치 용역을 아래와 같이 기간을 연장하여 계약 변경하고자 함

Ⅰ				용역개요		‘

□ 용 역 명: 서울로2단계 연결길 통합브랜드 디자인 개발 및 제작·설치 용역

□ 용역기간: ’20.6.29. ~’21.6.28.(12개월)

□ 계약금액: 908,280천원

□ 계 약 자: *******************************

□ 과업내용

○ 서울로2단계 연결길 통합브랜드(BI) 디자인 개발

○ 연결길과 주요거점 공간을 잇는 안내시설물 기획·제작·설치

○ 연계사업 활성화를 위한 협업 및 자문

Ⅱ				추진경위		‘

******************************

**************************************

***************************

************************************

**************************************

*************************************

*********************************

************************************

***********************************************

Ⅲ				변경내용		‘

□ 변경내용

구 분	당 초	변 경	비고
과업기간	‘20.06.29 ~ ’21.06.28 (12개월)	‘20.06.29 ~ ’21.11.30 (17개월)	용역기간 5개월 증가
계약금액	908,200천원	908,200천원	변동없음

*********************

*******************************************************************************

*********************************

***************

Ⅳ				향후계획		‘

○ ’21.06.23. : 계약변경 의뢰(공공재생과 → 재무과)

○ ’21.11.28.: 가로시설물 제작·설치

붙임  합의각서 1부.  끝.