문서번호	배수과-5639
결재일자	2021. 6. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	배수과장	급수부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
이명준	김근용	신용철	구아미		06/24 김태균
협 조	주무관			문정주
	주무관			조성균

우면산가압장 불용관 정비 및 급수체계 개선계획

2021.  6.

상수도사업본부

(급수부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

우면산가압장 불용관 정비 및 급수체계 개선 계획

암사저양정 급수체계 개선계획에 따라 ’20.10.월 전면 폐쇄된 우면산가압장 잔여 불용관 정비 및 급수체계 개선 계획을 보고 드림

□ 현황 및 문제점

○ ’20.10월 *암사저양정 급수체계 개선 완료

- 암사정수센터(저양정) 공급계통은 4개 지역배수지 운영수위가 비슷하고 공급경로가 길어(L=19㎞) 급수운영 어려움

※ 지역배수지 최저수위 : 길동 57m, 수서56m, 양재55m, 서초56m

- ’18~’20년까지 우면산가압장 급수체계 개선공사를 추진하여 ’20.10월 우면산가압장 가동을 중단하고, 양재가압장 통수 완료

○ 우면산가압장(폐쇄) 공급계통의 불용관 제수밸브(D2200) 지수가 되지 않아 누수물량이 펌프흡수정 쪽으로 유입

○ 우면산가압장 일부 급수구역이 암사정수센터 직송구간으로 전환되면서 급수체계 개선 필요

- 양재, 개포동 일대는 암사정수장 가압직송 급수구역으로 수압편차 발생

우면산가압장 위치도	전경사진	누수현황

□ 정비계획

○ 기본방향

- 우면산가압장 주변 잔여 불용관(D2200㎜, D700㎜) 정비

- 암사저양정 가압직송 급수구역을 서초배수지 간접급수로 전환

	< 급수운영 검토 >
◆ 급수현황 : 개포동, 양재동 일대 24천세대(일평균공급량 21,600㎥) ◆ 서초배수지 간접급수 전환 가능 여부 : 체류시간 12hr 으로 ‘적정’ ※ 60,000㎥(서초배수지 시설용량) ÷ 120,000㎥(일최대공급량) × 24hr = 12hr

○ 주요내용

- 서초배수지 배수관(D2200)과 구)양재배수지 불용관(D700) 연결

- 부단수차단기(2개소)를 사용하여 단수없이 연결공사 시행

< 공급계통도 >

○ 소요예산 : 총 1,500백만원

- ’21년 장기사용 송배수관 정비 예산 활용

○ 공사시행 : 강남수도사업소(시설관리과)

- 공사개요 : D700~D2200㎜, L=50m(부단수차단 2개소 포함)

- ’21.10월까지 공사완료토록 조속 발주 추진

□ 행정사항

○ 기획예산과

- ’21년 장기사용 송배수관 정비예산 재배정

○ 강남수도사업소

- 사업소 자체계획을 수립하여 ’21. 7. 2(금)까지 제출

- 설계 및 계약심사 이후 확정된 예산 재배정 요청

※ 부단수차단공법은 행정안전부 예규에 따라 ‘공법선정위원회’를 통해 선정

□ 향후계획

○ 공사발주 및 시행	’21. 7월

○ 서초배수지 급수운영 모니터링	’21.11.~12월

끝.