문서번호	치수과-4060
결재일자	2021. 6. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
한상신		최연호	06/24 박상보
협 조
	주무관			이호연

- 염창나들목 외 3개소 리모델링 공사 -

공종분리 검증위원회 결과 보고

2021. 6.

한강사업본부

(치  수  과)

- 염창나들목 외 3개소 리모델링 공사 -

공종분리 검증위원회 결과 보고

우리본부에서 시행예정인 『염창나들목 외 3개소 리모델링공사』에 대한 공종분리 검증위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 주계약자 공동도급 활성화 방안(행정2부시장 방침 제32호, ‘19.2.1.)

○ 염창나들목 외 3개소 리모델링 공사 공종분리 검증위원회 개최 계획

(치수과-4000, ‘21.6.23.)

□ 사업개요

○ 염창나들목 리모델링 공사

- 위    치 : 강서한강공원(강서구 염창동 223-2)

- 공사규모 : 차수벽 철거 및 이중육갑문 설치

엘리베이터 신설 및 기존 나들목 환경개선

- 총사업비 : 3,080백만원(시비)

- ‘21년 : 500백만원, ’22년 : 2,580백만원

- 사업기간 : 2021. 7. ~ 2022. 6.

○ 즈믄길나들목 외 2개소 리모델링 공사

- 위    치 : 즈믄길나들목(강동구 암사동), 반포안내센터, 서래섬나들목(서초구 반포동)

- 공사규모 : 엘리베이터 신설(반포안내센터) 및 기존 나들목 환경개선

- 총사업비 : 1,920백만원(시비)

- ‘21년 : 1,920백만원

- 사업기간 : 2021. 7. ~ 2022. 6.

□ 공종분리 검증위원회 구성 및 개최

○ 공종분리 검증위원회 구성

- 위원장 : 시설부장

- 위  원

***********************************

**********************************

**************************************

○ 공종분리 검증위원회 개최

- 일    시 : 2021. 6. 23.(수) 14:00

- 장    소 : 한강사업본부 시설부장실

- 검토사항 : 공종분리에 따른 공사 발주 방법 및 시공 참여비율 선정

(주계약자 공동도급, 종합건설업, 전문건설업)

- 주요 검토내용

· 공동수급체 구성원 간 하자구분이 분명하도록 공종내역 구분 여부

· 주계약자 공동수급체 구성원 수 및 비율 적정 여부

· 전문공종 분리 시 현장 시공여건 적정성 및 기타사항

· 주계약자 계획·관리·조정 업무대가 분담율 산정

□ 검 토 결 과

○ 염창나들목 리모델링 공사

- 검토결과 : 종합건설업

- 주요 검토의견

· ***********

▶ 공사현장이 한강변 자전거도로와 근접되어 작업공간이 협소하며, 추후 하자담보책임 여부를 명확히하기 위해 “종합공사업”으로 적용하는 것이 적절할 것으로 판단됨

▶ 공종분리는 전체적으로 적절하게 분류된 것으로 보이나, 구조물공에 포함된 부대시설과 캐노피 제작 설치공사는 부대공으로 변경하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.

· *************

▶ 공사의 주공종이 토목공사업으로 구성되어 주계약자 공동도급으로 시행시 나들목의 특성상 작업공간이 협소하여 동선확보에 어려움이 많을 것으로 판단됨

· *************

▶ 공사의 주공종이 토목공사업 또는 토목건축공사업의 내용으로 종합공사업 또는 토공사업, 철근･콘크리트공사업, 비계･구조물해체공사업, 부대공으로 적절하게 공종분리가 되어 있는 것으로 판단됨

○ 즈믄길나들목 외 2개소 리모델링 공사

- 검토결과 : 종합건설업

- 주요 검토의견

· ***********

▶ 나들목 개량공사 특성상 작업공간이 협소하며, 추후 하자담보책임 여부를 명확히 하기 위해 “종합공사업”으로 적용하는 것이 적절할 것으로 판단됨

▶ 공종분리는 전체적으로 적절하게 분류된 것으로 보이나, 구조물공에 포함된 부대시설, 캐노피제작 설치공사와 즈믄길나들목 누수공사는 부대공으로 변경하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

· *************

▶ 공사의 주공종이 토목공사업으로 구성되어 있음

▶ 주계약자공동도급으로 시행할 경우 나들목의 작업공간이 넓지 않아 작업동선 확보에 어려움이 많을 것으로 판단됨

▶ 즈믄길나들목 누수보수공사는 부대공이 적합

· *************

▶ 공사의 주공종이 토목공사업 또는 토목건축공사업의 내용으로 철근･콘크리트, 포장공, 석공, 부대공으로 적절하게 공종분리가 되어 있는 것으로 판단됨

□ 조 치 계 획

○ 공종분리 검증위원회의 검토 결과를 건설혁신과에 검증 의뢰하고 그 결과에 따라 공사 발주 및 공고 시행

□ 향 후 계 획

○ 2021. 6. : 공종분리 검증위원회 결과 검토 요청(건설혁신과)

○ 2021. 6. : 공사 발주 및 계약 의뢰

○ 2021. 7. ~ 2022. 5. : 공사 시행.

붙 임 : 검토의견서 각 1부.  끝.