실정보고 검토서

공사명

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

공사개요

· 위    치 : 서울특별시 성동구 용답동 243-3

· 규    모 : 총인 41.2만㎥/일

· 공사기간 : '17.9.13.~'21.6.30.

· 도 급 비 : 17,411백만원

· 시공사 : 엘림종합건설(주)외 2개사

· 감리단 : ㈜천일 외 3개사

· 설계사 : ㈜도화엔지니어링

실정보고 건명

혼합관로 및 합류관로부 무중단맨홀 가시설변경

실정보고

사유

혼합관로 구간에 지중용수 발생으로 가시설을 TS판넬에서 H파일+강판으로 변경하고, 합류관로부 무중단맨홀은 위치를 변경하면서 쉬트파일 설치 필요성이 없어져 사면Open Cut으로 변경코자 함

건설사업관리단

검토의견

혼합관로 구간은 용수로 인한 굴착면 등 지반 안정성이 불안하여 TS판넬을 H파일+강판으로 변경하고, 합류관로부 무중단맨홀은 위치를 변경함에 따라 가시설을 사면Open Cut으로 변경하는 것이 타당하다고 판단됨.

공기에 미치는 영향

없음

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
규모	TS판넬 109m H파일 천공 -	TS판넬 - H파일 천공 622m	TS판넬 △109m H파일 천공 622m
금액	158,320천원	115,973천원	△42,347천원

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

필요없음

발주처

검토의견

기현황보고 사항으로 혼합관로 지중용수 발생 및 합류관로부 무중단맨홀 위치변경에 따라 가시설변경이 필요하다는 책임건설사업관리기술자의 의견이 적정하다고 판단됨

비 고

결재

담당

유시혁

과장

오열상

부장

06/24

박홍봉