실정보고 검토서

공사명

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

공사개요

· 위    치 : 서울특별시 성동구 용답동 243-3

· 규    모 : 총인 41.2만㎥/일

· 공사기간 : '17.9.13.~'21.6.30.

· 도 급 비 : 17,411백만원

· 시공사 : 엘림종합건설(주)외 2개사

· 감리단 : ㈜천일 외 3개사

· 설계사 : ㈜도화엔지니어링

실정보고 건명

승강용 손잡이 설치 등 시설물 보완(중랑물재생센터 요청사항)

실정보고

사유

중랑물재생센터에서 유지관리 편리성 및 안전성을 위하여 승강용 안전손잡이, 이동식 사다리, 안전난간, 밀폐형 커버 등을 요청하여 설계에 반영코자 함

건설사업관리단

검토의견

중랑물재생센터 및 종합시운전 운영사의 요청사항으로 중랑총인처리시설 운영상의 안전을 고려하여 승강용 안전손잡이 등을 설치하는 것이 타당하다고 판단됨.

공기에 미치는 영향

없음

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
규모		승강용손잡이 75개소	승강용손잡이 75개소
금액	-	21,267천원	21,267천원

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

필요없음

발주처

검토의견

중랑물재생센터의 요청에 따라 운영상의 안전성 및 편리성을 고려하여 안전 손잡이, 이동식 사다리, 안전난간 등을 설치검토한 사항으로 중랑물재생센터와 책임건설사업관리기술자의 의견이 적정하다고 판단됨

비 고

결재

담당

유시혁

과장

오열상

부장

06/24

박홍봉