문서번호	도시철도계획부-5105
결재일자	2021. 6. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계획과장	도시철도계획부장
이경훈		代이상훈	06/24 정대현
협조	토목2과장		代임경태
	주무관		장대성

- 별내선(8호선연장) 건설사업 -

총사업비 조정사항 검토보고(13차-자율)

2021. 6.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

- 별내선(8호선연장) 건설사업 -

총사업비 조정사항 검토보고(13차)

별내선(8호선연장) 건설사업과 관련하여 물가변동 등 자율조정항목에 대해 총사업비를 조정(13차)하고자 보고드림

□ 사 업 개 요

❍	위치	:	서울 강동구 암사동(8호선) ~ 서울시계 ~ 구리시 토평동 (서울시 강동구 암사동 ～ 별내역(경춘선))
❍	규모	:	3.72㎞, 정거장 1개소 (전구간 : 12.82㎞, 정거장 6개소)
❍	총사업비	:	1,340,632백만원 (서울시 521,726백만원, 경기도 818,906백만원)
❍	사업기간	:	2015 ~ 2023

❍ 계 약 현 황

공 구 명	서울시 시행		경기도 시행
	1공구(기타)	2공구(기타)	3공구(T/K)	4공구(T/K)	5공구(기타)	6공구(T/K)
공사기간	´17.8.23~ ´23.8.21	´17.9.30~ ´23.9.28	´16.6.8~ ´21.12.8	´16.7.18~ ´21.11.23	´16.10.4~ ´22.2.4	´16.6.7 ~´21.10.14
연장(km)	1.18	2.54	2.38	2.58	1.76	2.38
시공사	쌍용건설	두산건설	현대건설	태영건설	대우건설	고려개발
감리단	동해	도화	서영	동부	신성	도화

□ 총사업비 조정현황

(단위 : 백만원)
구 분		총사업비(A)			조정 증액(B)		조정 후 총사업비(A+B)			비 고 (증감율)
		계	서울시	경기도	서울시	경기도	계	서울시	경기도
<총사업비>		1,340,632	521,726	818,906	*****	*	*********	*******	*******	**** ******
1. 공사비		1,140,927	400,137	740,790	*****	*	*********	*******	*******	**** ******
ㅇ 토목		834,839	258,315	576,524	*****	*	*******	*******	*******	**** ******
ㅇ 궤도		27,492	8,360	19,132	*****		******	*****	******
ㅇ 건축(기계포함)		95,743	13,029	82,714			******	******	******	**** ******
ㅇ 전기		76,481	27,494	48,987		*	******	******	******
ㅇ 신호		35,078	35,078	-			******	******	*
ㅇ 통신		28,160	14,727	13,433			******	******	******
ㅇ 차량기지		25,828	25,828	-	***		******	******	*
ㅇ SE		5,558	5,558	-			*****	*****	*
ㅇ 시운전		11,748	11,748	-			******	******	*
2. 보상비		35,367	12,756	22,611			******	******	******
3. 시설부대경비		88,738	33,233	55,505	***	*	******	******	******	**** ******
	① 설계비	45,879	16,603	29,276			******	******	******
	② 감리비	40,964	16,026	24,938	***	*	******	******	******	**** ******
	③ 시설부대비	1,895	604	1,291	*	*	*****	***	*****	**** ******
4. 차량구입비		75,600	75,600	-	*	*	******	******	*

※ 증감율 : 서울시 / (전체)

************************

**********************

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*********************************************************************************

***************************************************************************************************************************

□ 향후 추진계획

❍ 총사업비 조정요청 곰문시행 (대도시권광역교통위원회, 재정담당관)

❍ 총사업비 관리시스템(D-Brain) 입력 요청 (경기도)

붙임 : 1) 별내선 총사업비 조정 요구서(13차-자율) 1부.

2) 별내선 총사업비 조정 보충자료(13-자율) 1부.  끝.