문서번호	도로보수과-5755
결재일자	2021. 6. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
황태선		06/24 代최완
협조

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

4차 작업지시 계획보고

[2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)〕

2021. 6.

북부도로사업소

(도로보수과)

4차 작업지시 계획보고

[2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)〕

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)-북부

○ 공사기간 : 2021. 1. 28. ~ 2021. 12. 31.

○ 시 공 사 : *************

○ 총공사비 :*************

□ 4차 작업지시 개요

○ 우기 전 도로부속물(도로옹벽)점검결과에 따라 콘크리트옹벽을 보수하고 민원사항에 대해 적기에 정비하여 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성하고자 함.

- 작 업 기 간 : 2021. 6. 28. ~ 8. 16.

- 작 업 위 치 : 도봉구 해등로 외 2개 노선(화랑로, 종로)

- 정 비 내 용 : 옹벽 보수 및 교통부속물 정비

- 정 비 물 량 :

○ 작업지시 내용

연번	시설물명	위 치	작업지시 물량			작업 조건		비 고
			공 종	수 량	단 위	주	야
1	콘크리트 옹벽	도봉구 해등로 (방학동520-1)	표면보수 단면보수	10.59	㎡	○
2	갈매기표지	노원구 공릉동26-35 (화랑로태릉선수촌)	갈매기표지 정비	10	개	○
3	시선유도봉	흥인지문사거리~ 동묘앞역사거리	시선유도봉 설치	12	개	○
4	무단횡단금지시설	종로 (흥인지문, 세종대로)	무단횡단금지설 설치 및 철거	287	경간	○

○ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구분	계약금액	기 작업지시	금회 작업지시	잔 액	비 고
도급비	309,726	177,586	20,240	111,900
관급비	20,000	-	-	20,000
이전비	22,204	11,916	-	10,288
총공사비	351,930	189,502	20,240	130,272

□ 조치계획

○ 제4차 작업지시 통보 및 시행.

○ 작업완료 보고서에 따라 실정산 처리(안전시설비 등)

○ 해당 노선 관할 경찰서와 교통 통제 사전협의로 시민불편 최소화

붙임  1. 작업지시서(2021-04차) 1부.

2. 내역서(2021-04차) 1부.   끝.